문서번호	방재시설부-11541
결재일자	2017.7.4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		조성만	07/04 남궁용
협 조

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

유지관리부서 요구사항 실행방안 검토 보고

2017. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

유지관리부서 요구사항 실행방안 검토 보고

관악산 저류조 유지관리부서의 요구사항 실행방안 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로 1 서울대학교 내 ․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 설치 65,000㎥

- 서울대 정문 앞 : 40,000㎥

- 서울대 내 : 25,000㎥(버들골 20,000㎥, 공대폭포 5,000㎥)

○ 공사기간 : 2012. 1. 6 ~ 2017. 7.15

○ 도 급 액 : 41,424백만원

○ 시공사 / 감리사 : 남광토건(주)외 1개사 / (주)신명건설기술공사

보고내용

○ 관악산 저류조 유지관리부서의 요구사항 실행방안 검토 보고임

- 요구사항

․ 서울대 정문 앞 저류조 유지관리도로 출입문 설치

․ 버들골 저류조 유지관리도로 출입문 설치

․ 버들골 저류조 배전반 계단설치

․ 버들골 저류조 내 침사조 퇴수구 설치

․ 버들골 저류조 내 수위표 설치

- 실행방안

․ 서울대 정문 앞 저류조 및 버들골 저류조 출입문 설치건은 시설물 보호 및 안전차원에서 설치하는 것이 적정하다 판단되며 버들골 저류조는 출입물 설치가 어려운 실정이므로 셔터문으로 설치하고자 함(관악구청 협의 완료)

․ 버들골 저류조 배전반 위치가 단차가 있어 출입이 용이하지 못하므로 계단설치는 적정함

․ 버들골 저류조 내 침사조 퇴수구 설치건은 유지관리상 필요하므로 침사조 벽체를 천공(D100㎜, 2개소)하여 잔류수를 제거토록 조치하고자 함

․ 버들골 저류조 내 수위표 설치는 유지관리 상 필요하므로 도색으로 조치하고 자함

- 공사비 증․감내역

공 종	당초	변경	증․감(△)	비고
1. 서울대 정문 앞 저류조	-	13,209,799	13,209,799
2. 버들골 저류조	-	17,068,745	17,068,745
직접공사비	-	30,278,544	30,278,544
제경비 등	-	10,201,456	10,201,456
도급공사비	-	40,480,000	40,480,000
관급자재비	-	-	-
총 공 사 비	-	40,480,000	40,480,000

처리방안

○ 건설사업관리자의 검토내용이 적정하다 판단되므로 실정보고 사항을 승인조치하고 추후 설계변경시 반영하도록 하고자 함.

붙임  건설사업관리단 검토의견 1부.  끝.