문서번호	방재시설부-13107
결재일자	2017.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
박중모		조성만	07/26 남궁용
협조

- 합정외 1개소 빗물펌프장 건설폐기물처리용역(잔여분) -

정산 설계변경(1회) 검토 보고

2017. 7.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

- 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 건설폐기물처리용역(잔여분) -

정산 설계변경(1회) 검토 보고

시설공사 시행 중 현장여건 변동 등으로 발생한 건설폐기물에 대한   정산 설계변경(1회) 검토 보고임.

1		관련근거

❍ 설계변경 검토보고서 제출 : 서울시설공단 공사감독1처-5293호(‘17.7.26.)

2		용역개요

❍ 용 역 명 : 합정외 1개소 빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역(잔여분)

❍ 규    모 : 폐콘크리트 116톤, 폐아스콘 24톤

❍ 용역기간 : 2016. 05. 03. ~ 2017. 07. 28.

❍ 용 역 비 : 금3,960,000원

❍ 용 역 사 : 주식회사 대성해체산업, (주)도요이디아이

3		위탁감독 보고내용

❍ 설계변경 주요내용

- 추가 발생물량 설계변경 반영

․유입암거와 집수조 접합을 위한 C․I․P 철거

․이중수문 설치구간 매설된 옹벽 및 토출관 기초 철거

․증설펌프장과 접한부분 파손된 담장 및 포장 철거

❍ 설계변경 현황

구 분	당 초	변 경	증 · 감
용역비	3,960,000원	7,480,000원	증3,520,000원

❍ 수량 및 용역비 증 · 감 현황

- 총 차

공 종	규격	단위	수 량			공사비(천원)
			당초	변경	증․감	당초	변경	증․감
1. 운반비								증991
폐콘크리트		㎥	50	104	증54	920	1,911	증991
폐아스콘		㎥	10	10	-	187	187	-
2. 처리비								941
페콘크리트		톤	116	241	증92	2,053	4,267	증2,214
폐아스콘		톤	24	24	-	449	449	-
합 계(금액조정)						3,600	6,800	증3,200
공급가액						3,600	6,800	증3,200
부가세						360	680	증320
용역비						3,960	7,480	증3,520

4		보고자 검토 및 조치의견

❍ 상기 감독기관 보고내용 검토결과 시설공사 현장여건 반영에 따른 폐기물 설계변경이 필요한 실정으로, 변경계약 의뢰후 준공처리 하고자 함.

❍ 변경계약 의뢰내용                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
용 역 비	3,960,000원	7,480,000원	증3,520,000원
용역기간	2016.05.03. ~ 2017.07.30.	변동 없음	-

붙 임 : 감독기관(공단) 관련문서, 검토보고서, 변경내역서 1부.  끝.