투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(잠원2빗물펌프장 신설공사)

우리 본부에서 건설사업으로 시행중인 「잠원2빗물펌프장 신설공사」 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠원2빗물펌프장 신설공사

나. 도 급 비 : 10,597,976천원(3차분 5,063,856천원)

다. 공사기간 : 2013. 01. 03. ~ 2017. 07. 31.

라. 도 급 사 : 에스트건설㈜

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책, 잠원 빗물펌프장

시설용량증대, 시설비 및 부대비, 시설비

바. 준공기한 연기(계약금액 변경 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	`13. 01. 03. ~ `17. 07. 31.	`13. 03. 11. ~ `18. 02. 28.	증)7개월
3차분	`16. 04. 06. ~ `17. 07. 31.	`16. 01. 01. ~ `17. 09. 30.	증)2개월

사. 연기사유 : 붙임 참조

붙임  1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	송영배		치수시설과장	조성만		방재시설부장	07/27 남궁용
협조자	주무관	이병환		경리과장	최정수
시행	방재시설부-13214	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개