문서번호	도로보수과-2174
결재일자	2014.4.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
강종훈		김승태	04/16 민승기
협 조
	주무관			한수영

2014년 포장도로유지보수공사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

남부도로사업소

(도로보수과)

2014년 포장도로유지보수공사 시행계획

2014년 포장도로유지보수 공사를 적기에 발주하여 혹한으로 동결된 노후 아스팔트도로를 예방적 보수 및 항구복구함으로써 해빙이후 파손발생을 줄여 안전사고 예방과 쾌적한 도로환경 조성에 만전을 기하고자 함.

■ 근 거 :

○ 긴급복구예산 재배정(1,500백만원) 도로관리과-2032(‘14.2.6)

- 거북등 균열 및 소파발생이 예상되는 지역은 최우선적으로 정비지시

○ 불량맨홀 정비예산 재배정(600백만원) 도로관리과-3190(‘14.2.26)

- 불량맨홀 유지관리비 재배정

○  포장유지보수예산 재배정 (250백만원) 도로관리과-3977(‘13.3.12)호

- 예방적유지보수(균열,표면)(150백만원)

- 저소음포장(100백만원)

○  포장유지보수예산 재배정 (5,094백만원) 도로관리과-5843(‘13.4.11)호

- 노후포장도로정비공사 (4,494백만원)

- 굴착복구기금(사후정비)(600백만원)

■ 사업개요

○ 사업기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 02. 28

○ 예   산  : 7,444백만원(굴착 시행도로정비 600백만원 포함)

○ 보수대상 : 12노선 25개소 1,954a(긴급복구 및 직영보수 별도)- 첨부

■ 추진방향

○ 주요사업 및 부대공사 분리․ 통합 발주

- 포장공사 공종별 분리 ․ 통합 발주

․ 긴급복구예산 조기 재배정에 따른 긴급복구(연간단가) 기 발주

․ 포장유지예산 재배정에 따른 효율적 추진을 위해 “2014년 포장도로 유지보수공사 2개지역 분리발주〔A구역(서초,동작), B구역(관악,금천,영등포)〕

․ 저소음예산(100백만원), 굴착복구시행도로 정비(600백만원)는 “2014년 포장도로 유지보수공사(A·B구역)”에 포함 시행

․ 예방적 유지보수 예산(150백만원)은 기 발주된 “2014년 긴급복구공사(연간단가)”에 설계변경시 반영후 시공(‘13년 시행분 하절기 시험분석후 시행)

○  성과관리 목표 및 재생아스콘 의무사용(30%) 반영

․ 포장도로 유지보수공사에 저소음아스콘(100백만원) 시행 및 재생아스콘 30% 의무 반영

․ 일반포장 자재는 소성변형에 강한 #67 아스콘(1등급) 사용

○  차선도색공사 분리 발주

․ 고휘도 도료 사용 - 일반시도(전용도로포함) 및 원인자부담공사

(※ 도로기준100m이내 주변과 동일한 재료로 도색실시)

○  폐아스콘 처리

․ 포장구간내 폐아스콘처리는 운반비 반영(처리비 무대)

․ 직영 폐아스콘 처리는 제일아스콘 무대 협약체결

○ 직영반 자재구매

․ 소규모 포장보수 및 소파보수 자재 등 구입

■ 세부추진방향

○ 현장조사 : 2014 1. 1 ~ 2. 28(조사완료)

○  물량산출 및 설계서 작성 : 2014 3. 1 ~ 4. 15

․ 도시안전실 포장도로 공통대가 확정에 따른 설계반영

․ 조달청 2014년  원가계산 제 비율 반영

․ 노후포장도로 재배정 예산에 맞춰 설계물량(시공 및 자재량) 확정

․ 간선도로 표층용 아스콘 1등급골재 사용에 따른 자재비 인상 반영

○  계약심사의뢰 : 2014. 4. 17 ~ 4. 23

․ 1차 계약심사 완료 : 소규모긴급복구공사(연간단가)

․ 2차 계약심사 의뢰 : 포장도로유지보수공사 (2014. 4.17)

○ 발주 : 포장유지보수공사(A·B구역) : 2014. 4. 25한

■ 예산 활용 및 발주 계획                                 (백만원)

사 업 명	예산액	발 주 계 획(2014년)				담당자	비 고
		발 주 금 액	발 주 예 정	착 공 예 정	준 공 예 정
포장도로유지보수	7,444 (600)	7,444 (600)					〔굴착 시행도로 정비비(6억)포함〕
긴급복구(연간단가)	1,650	1,160	2.27 완료	3.21	’15.2.28	강종훈	예방적보수비 (150백만원)포함
포장도로유지(A구역)	2,053	2,053	4.25	5.12	‘14.12.31	조경현
포장도로유지(B구역)	2,111	2,111	4.25	5.12	‘14.12.31	조경현	굴착시행도로 및 저소음공사 포함
불량맨홀정비	600	521	3.27 완료	3.28	‘15.2.28	박병규
포장구간 차선도색	410	410	4.11 완료	4.29	‘15.2.28	조경현
차선도색 감리 및 설계용역	25	25	4.21	4.29	‘15.2.28
폐기물 처리용역	482	482	3.14 완료	4.16	‘15.2.28	정철식
직영자재비(긴급복구자재비 포함)	113	682	-	-	-	김형갑

첨부  2014년 노후포장 및 굴착시행도로 정비대상.  끝.