투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(서울창업허브별관 리모델링공사)

1. 방재시설부-2637(2017.2.17.)호와 관련입니다.

2. 「서울창업허브별관 리모델링공사」 추진과 관련하여 조경공사 소요 자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 서울창업허브별관 리모델링공사

나. 품 목 명: 목재데크 등 2종

다. 변경사유: 공사기간 연장에 따른 조경 관급자재 납품연기

라. 변경내용

납 품 요구번호	품 명	규격	단위	수량	납품기한		비고
					당초	변경
121710970200	목재판재	1800×90×21	㎡	627.79	2017.9.30	2018.1.02
121710970300	콘크리트블록	200×200×60	㎡	971.44	2017.9.30	2018.1.02

붙 임: 관련공문 1부.  끝.

	방재시설부장
★주무관	정영미		조경시설과장	신용우		방재시설부장	08/28 남궁용
협조자
시행	방재시설부-14992	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	3708-8796	/전송	3708-8756	/	young306@seoul.go.kr	/	대시민공개