문서번호	버스정책과-5756
결재일자	2017.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정류소관리팀장	버스정책과장
강설영		이희신	08/29 김정윤
협조

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업

준공기한 연기 검토보고

2017. 8.

도시교통본부

(버스정책과)

2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 준공기한 연기 검토보고

2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사 중 우기로 인한 일정지연 및 표지판 신규 제작에 따른 공사기간 부족으로 준공기한을 연기하고자 함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업

○ 사업목적

- 시내버스정류소 이용환경 개선과 가로(보도)시설물 등에 의한 정류소 접근 및 승하차 불편해소

- 지역 및 현장여건에 맞는 독창적이면서 매력적인 버스정류소 구현

○ 사업내용

- 사업대상지 : 서울시 종로구 KT광화문지사 정류소 등 45개소

․ 무장애정류소 설치 : 40개소(당초 : 41개소 → 변경 : 40개소)

․ 디자인승차대 설치 : 5개소

- 사업내용

구분	토목공사	전기공사
사업 내용	서울시 표준형 승차대 설치 라운드경계석, 휠체어대기공간, 점자블록 등 설치	전기공사(배관, 배선공사) 버스정보안내단말기(알뜰BIT) 등 설치

○ 계약내역

공사명	계약상대자	계약금액	계약일자	착공일자	준공일자
2016년 가로변 정류소 이용환경 개선공사	주식회사 태영테크 대표 홍성권	금1,064,417,150원	2016. 12. 9.	2016. 12. 12.	2017. 8. 30.
2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 전기공사	㈜일렉트릭이앤지 대표 배용	금199,967,740원	2016. 11. 11.	2016. 11. 16.	2017. 8. 30.

□ 공사진행 현황

(기준일 : 2017. 8. 30.)

구분	승차대 설치	라운드경계석	휠체어대기공간	점자블록	차선도색	전기공사	알뜰BIT
대상	39EA	40개소	43개소	43개소	261m (제거 142m)	45개소	26EA
실적	완료	완료	완료	완료	-	완료	23EA

□ 준공기한 연기 검토

○ 연기사유

- 토목공사 : 우기로 인하여 일부작업 일정지연

․ 차선도색(261㎡), 차선제거(142㎡)

- 전기공사 : 단말기 제작 불가 표지판(3EA) 발생

․ 알뜰BIT 설치를 위한 표지판(3EA) 신규 제작

○ 준공기한 연기내역

공사명	준공기한		연기 일수	귀책사유
	당초	변경
2016년 가로변 정류소 이용환경 개선공사	2017. 8. 30.	2017. 9. 15.	16일	서울특별시
2016년 가로변정류소 이용환경 개선사업 전기공사	2017. 8. 30.	2017. 9. 15.	16일	서울특별시

□ 조치계획

○ 변경계약의뢰(재무과) : ‘17. 8.29

○ 공사준공 : 2017. 9. 15.   끝.