투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 건설폐기물처리용역 준공기한 연기의뢰(총차, 4차)

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 건설폐기물처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 건설폐기물처리용역(총차 및 4차)

나. 용역금액 : 총차 : 1,669,260천원(4차 86132천원)

다. 용역기간 : ‘09. 4. 1 ~ ’14.04.30

라. 용역업체 : 인선ENT㈜ 대표이사 김대봉

마. 연기사유 : 절대공기 부족에 따른 연기

바. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	증·감
총차	'09. 4. 1 ~ '14. 4.30	'09. 4. 1 ~ '15. 2.28	증)10월
4 차	'14. 4.29 ~ '14. 4.30	'14. 4.29 ~ '15. 2.28	증)10월

- 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1) 준공기한 연기 검토보고서 1부

2) 준공기한 연기 조치 의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송민영		환경시설과장	박희천		방재시설부장	04/30 박종웅
협조자	계약2팀장	代전종남
시행	방재시설부-2437	(		)	접수		(		)
우	100-191	서울 중구 덕수궁길15 (서울시 서소문별관 2동2층)	/
전화	02-3708-8783	/전송	02-3708-8756	/	songmy01@seoul.go.kr	/	대시민공개