투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(북악스카이웨이1교 정밀안전진단용역)

우리사업소에서 시행중인 「북악스카이웨이1교 정밀안전진단 용역」의 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 북악스카이웨이1교 정밀안전진단 용역

나. 계약상대자 : 에스큐엔지니어링(주) 대표 이 래 철

다. 준공기한 연기

- 당 초 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 4. 30

- 변 경 : 2013. 12. 23 ~ 2014. 5. 30

라. 연기사유

- 용역 최종보고회 (2014.4.22.)결과 제시된 자문위원 의견 추가

검토에 따른  준공기한 연기

마. 귀책사유 : 서울특별시

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 :  1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.  끝

	시설보수과장
주무관	이훈욱		시설보수과장	04/30 정재현
협조자
시행	시설보수과-3098	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5457	/전송	945-5459	/	hoonook0537@seoul.go.kr	/	대시민공개