문서번호	정수시설과-584
결재일자	2014.5.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
유재진		김창현	05/12 이철해
협조	주무관		민태식
	주무관		지동성

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2014년 전기설비 유지보수 연간단가 시행계획

2014. 5.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 전기설비 유지보수 연간단가 시행계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 연간단가공사를 다음과 같이 시행하여 신속한 전기설비 유지관리 및 원활한 정수시설 운영에 만전을  기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

정수장의 노후 전기설비 적기정비 및 고장시 긴급복구를 위한 보수

공사를 연간단가 계약으로 시행하여 원활한 정수처리 공정관리

고장이나 보수공사때마다 작성하는 보고서, 발주계획수립, 설계서작성, 계약추진 등으로 인한 행정낭비 방지

수의계약을 대폭 감축하여 업무처리의 투명성 및 청렴도 향상에 기여

Ⅱ		관련근거

본부장 방침 기전설비과-299호(2013.1.21)

『청렴도 향상을 위한 정수센터 기전설비 유지보수 계약업무 개선』

본부 기전설비과 - 1175호(2014.2.25)

『2014년도 기전설비 유지보수 연간단가 계약 추진 계획 알림』

본부 기전설비과 - 1315호014.3.3)

『2014년도 상수도 기전설비 연간단가 일위대가(전기) 수정사항통보』

Ⅲ		공종별 주요 공사내역

중계펌프장 압력전송기 설치

□ 중계펌프용 인입, 토출용 압력전송기 설치

낙뢰로 인한 서지 보호기 설치

□ 주변전실, 관리본관, 탈수기동, 사여과지, 약품실 전원부

가성소다 조작제어반 교체

□ 가성소다 펌프의 원격제어를 위한 조작제어반 교체

탈수기동 배슬러지시설 현장조작반 교체

□ 현장조작반 노후 및 부식으로 인한 현장제어 불가로 인한 교체

관사 정문 CCTV 설치

□ 관사 정문입구 보안용 CCTV 설치

기타 전기설비 등

※ 사고발생시 예산 범위내에서 선 공사후 설계변경 실시

Ⅳ		공사개요

공사명 : 2014 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 연간단가공사

공사기간 : 2014. 6 ~ 2014. 12. 31

공사내용 : 중계펌프장 압력전송기 설치외 6종 전기설비 유지보수

계약방법 : 전자공개수의계약

□ 입찰참가자격 : 전기공사업법 제4조에 따라 전기공사업을 등록한자로서

비상시 긴급보수를 고려하여 주된 영업소의 소재지가 서울시에 있는 업체

□ 계약기간 : 착공일로부터 2014. 12. 31까지

소요예산 : 53,680천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

Ⅴ		추진일정

2014. 05. 13 : 공사발주(시행)

2014. 05. 26 : 계약 및 착공

2014. 12. 20 : 공사준공

※ 작업은 작업지시서에 의하며, 계약상대자의 기성 청구시 작업완료    보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급

따로붙임 : 1. 설계서 1부

2. 공사설명서 1부

3. 공사지침서 1부

4. 가성소다 배전반 도면 1부. 끝.