문서번호	설비부-5417
결재일자	2014.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		녹색성장과장	설비부장
이기철		김창균	05/21 박기형
협조

『서울과학관 건립 정보통신공사』 관급자재(위성수신기) 납품기한 연기보고

2014.  5.

『서울과학관 건립 정보통신공사』

관급자재(위성수신기) 납품기한 연기보고

『서울과학관 건립 정보통신공사』의 관급자재인 위성수신기의 설치시기가 건축공사 일정상 미도래로 인해 납품기한 연기를 검토 보고임.

관련근거

○ 납품기한 연기에 대한 감리기술검토[정과감 제14-072호(2014.05.21.)]

계약현황

[건 명 : 서울과학관 건립 정보통신공사 위성수신기 구매]

품 명	납품기한	계약금액(원)	계약업체	비고
위성수신기	2014.05.28	113,812,280	㈜호서텔레콤	3자단가

보고내용

○ 납품기한 연기

품 명	납 품 기 한		비 고
	당 초	변 경
위성수신기	2014.05.28	2016.01.12	계약금액 변경없음

○ 연기사유 : 건축공사 추진일정에 따른 설치시기 미도래

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

조치의견

○ 상기 관급자재 납품기한 연기 의뢰(건설총괄부).

붙임  1. 감리검토의견서 및 납품기한연기 합의서 각1부.

2. 계약서(물품구매목록) 각1부.  끝.