문서번호	시설과-3677
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	05/27 함석주
협조

2014년 예방사방사업 폐기물 처리용역

설계변경사항 검토결과보고

2014. 5.

중부공원녹지사업소

시설과

2014년 예방사방사업 폐기물 처리용역

설계변경사항 검토결과보고

「2014년 예방사방사업 폐기물처리용역」과 관련하여 물량증가에 따른 설계변경사항을 아래와 같이 검토 보고드림.

□ 용역현황

❍ 사 업 명 : 2014년 예방사방사업 폐기물처리용역

❍ 용역기간 : 2014. 3. 28 ~ 2014. 5. 30

❍ 도 급 액 : 금10,050,000원

❍ 도 급 자 : 서울환경 대표 양성희(운반), ㈜아이케이 대표 김상문외(처리)

□ 설계변경사항

❍ 관련근거 : 동림2014-133(‘14.4.30.)호 및 시설과-3153(‘14.5.9)호 등

❍ 변경물량

구분	설계변경(안)	비고
폐기물운반	▶ 현장여건에 따른 물량 변경 -건설폐기물 : 355톤 → 446톤	시설과-2779(14.4.24.) 및 시설과-3153(14.5.9.)호 등 기 검토보고한 사항임
폐기물처리	▶ 현장여건에 따른 철거물량 추가발생 및 매립된 혼합폐기물 신규발생에 따른 변경 -폐콘크리트(T200) : 355톤 → 446톤 -혼합폐기물(건설폐재류) : 355톤 → 446톤 -혼합폐기물(소각5%) : 0톤 → 203톤

❍ 변경금액

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급액	공급가액	9,136,364	16,214,000	증) 7,077,637
	부가가치세	913,636	1,621,400	증) 707,764
	계	10,050,000	17,835,400	증) 7,785,400

□ 보고자 의견

❍ 기 감리실정보고, 전문가현장점검, 산재방재과 점검 등 검토된 사항으로 폐기물 증가 및 폐기물 업체 계근량에 맞춰 설계변경 처리하고자 하며,

❍ 추가 소요예산은 “2014년 예방사방사업(예장동,이화동)” 등의 집행잔액(낙찰차액) 및 산지방재과 추가 재배정 예산을 활용하고자 함.

- 예산과목 : 산지방재과, 산림안전관리, 산림재해방지, 산림내사면정비, 시설비

붙임 1. 변경내역서 1부.

2. 현황사진 1부.

3. 제비율검증 1부.  끝.