문서번호	토목부-10262
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박천용		최광무	05/28 노우성
협조

「서부트럭터미널앞 지하차도건설공사」

유지관리부서 추가 요구사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

「서부트럭터미널앞 지하차도건설공사」

유지관리부서 추가 요구사항 검토 보고

서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 준공 전 합동점검 결과 유지관리부서의 추가 요구사항 실정 보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

1		관련근거

○ 합동점검 실시 : 2013.12.12.

○ 유지관리부서 추가 요구사항 검토 보고[서지(감) 제14-210(‘14.05.21)]

2		공사개요

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사

○ 공사규모 : 도로구조개선 L=1.35Km

지하차도 L=1,075m(BOX 740m, U-TYPE 335m)

○ 공사기간 : 2008.03.10 ∼ 2014.06.30.

○ 공 사 비 : 금820억원(공사비 772, 기타 48)

○ 시 공 사 : 중앙건설(주)외 1개사

3		감리단 보고내용

□ 유지관리부서 추가 요구사항 검토

○ 추진경위

- ‘13.12.12.  : 지하차도 전면개통전 유관기관 합동점검(강서도로사업소 등 관련기관)

- ‘13.12.13.  : 현장점검 결과 통보 (강서도로사업소 → 도시기반시설본부)

- ‘13.12.17.  : 지하차도 전면개통대비 합동점검 결과 알림 (도시기반시설본부 → 감리단)

- ‘14.05.09.  : 유지관리부서 추가요구사항 실정보고 (시공사 → 감리단)

- ‘14.05.21.  : 유지관리부서 추가요구사항 실정보고 제출 (감리단 → 도시기반시설본부)

○ 유지관리부서 요구사항 및 조치방안

(단위 : 원)

구 분	요 구 사 항	조 치 방 안	소요공사비 (직접공사비)
강서 도로 사업소	전기실,제어실 내부에 결로발생 우려	결로방지페인트	3,741,448
	전기실,제어실,펌프실 내부마감 필요	아미텍스, 에폭시라이닝, 스틸그레이팅	6,833,761
	난방 및 화장실 시설설치 필요	이동식 화장실 설치	6,150,528
	기타 시설물 보완사항	출입계단 설치	3,051,324
양천 소방서	전기실 차수문 뒤 방화문 설치	방화문 설치 반영	6,447,557
	합 계		26,224,618

□ 감리단 검토의견

○ 강서도로사업소에서 추가 요구한 전기실, 제어실, 펌프실 내부마감 및 결로방지대책, 근무자의 근무여건 개선을 위한 화장실 및 출입계단을 설치하여 원활한 시설물 유지관리를 위하여 반영하고

○ 양천소방서에서 요구한 전기실 출입구를 방화문으로 설치하여 소방필증 교부가 가능하도록 하는 것이 타당하다고 사료됨

○ 실정보고 승인 후 설계변경 심의결과에 따라 추후 설계에 반영하고자 함

4		조치 계획

○ 감리단 검토의견과 같이 시설물 인수부서의 의견을 존중하여 안전하고 편리한 유지관리와 시민의 이용에 지장이 없도록 추가 요구사항을 승인코자 하며, 설계변경 심의결과에 따라 반영토록 업무지시 하고자 함.

붙 임 : 1. 감리원 실정보고 1부.   끝.