문서번호	시설과-2869
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	토목시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
김지훈	윤학수	한성현		06/11 신시섭
협 조

시립영보자애원등 2개소 녹색자금사업

실시설계용역 기간연장 검토보고

2014. 6

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

시립영보자애원등 2개소 녹색자금사업

실시설계용역 기간연장 검토보고

2014년 녹색자금사업 실시설계용역과 관련하여 수혜기관 요구사항 반영검토, 전문가 자문 및 설계도서 작성 등 소요기일 절대부족으로 기간연장 검토보고 드림.

용역개요

❍ 용 역 명 : 시립영보자애원등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역

❍ 대상지 및 규모

연 번	시 설 명	면 적 (㎡)	총공사비 (백만원)	비 고
계		1,590	234
1	시립영보자애원	600	117	지상부
2	시립영보정신요양원	990	117	지상부

❍ 계약금액 : 금13,452,000원(금일천삼백사십오만이천원)

❍ 도 급 자 : (주)동해종합기술공사 대표 정점래

서울특별시 성동구 광나루로 6길 35

❍ 용역기간 : 2014. 4. 21 ~ 6. 12

❍ 사업내용 : 수목, 초화류 식재 및 등

추진경위

❍ 2014. 2. 10 : 녹화협약 체결

❍ 2014. 3. 06 : 수혜기관 의견수렴 및 대상지 방문

❍ 2014. 3. 27 : 녹색자금사업 실시설계용역 시행

❍ 2014. 4. 21 : 계약체결

❍ 2014. 5. 15 : 설계용역 중간보고회(1차) 개최

❍ 2014. 5. 27 : 설계용역 중간보고회(2차) 개최

❍ 2014. 6. 03 : 푸른도시국 조경과 보고

검토내용

❍ 설계용역 기간연장 사유

- 수혜기관 요구사항 반영 검토, 전문가 자문 및 설계도서

(예산내역서, 설계도면) 작성 등 용역기간 절대부족함.

❍ 연장기간

구 분	시립영보자애원등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역		비 고
	당 초	변 경
변 경 기 간	2014. 4. 21 ~ 2014. 6. 12	2014. 4. 21 ~ 2014. 7. 11	30일 연장

❍ 연장에 대한 귀책소재 : 서울특별시서부공원녹지사업소

❍ 지체상금부과여부 : 미부과

향후계획

❍ 2014. 6. 24 : 전문가(신은기 기술사) 자문

❍ 2013. 6. 13 ~ 7. 10 : 설계도서 작성 및 용역준공

조치의견

❍ 상기와 같이 설계용역기간연장을 시행하여 업무추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.  끝.