투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관악구청장(토목과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 [봉천4교차로외 3개소교통사고 잦은 곳 개선 교통안전시설물설치공사(신호)]

1. 관악구청 토목과-6305호(2014. 5.27.)와 관련입니다

2. 관악구 봉천4교차로외 3개소 교통안전시설물설치 원인자부담공사의 공사기간 변경을 아래와 같이 승인하오니 교통사고 예방 및 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 봉천4교차로외 3개소교통사고 잦은 곳 개선 교통안전시설물설치공사

나. 공사기간

- 당초 : 2014. 3.11. ~ 5. 31.

- 변경 : 2014. 3.11. ~ 6. 30.

다. 변경사유 : 도로안내표지판 신규 설치

라. 공사장소 : 봉천4교차로외 3개소

마. 원 인 자 : 관악구청 토목과장

바. 공사관리번호 : 표지 2013-0208-033

사. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
교통안전표지	(주)제일엔지니어링	(주)건영이앤씨	케이로드	교통안전표지설치공사 1식

3. 공사완료후 7일 이내에 준공요청 공문과 준공서류(감리경유)를 제출하여 주시기바랍니다.(준공관련 도면, 준공사진, 기타 관련서류 등 CD포함 이메일 발송) 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
★주무관	조용학		기전과장	06/11 유재옥
협조자
시행	기전과-2622	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 도림로 145(대림동 711)	/
전화	02)3284-5455	/전송	02)3284-5470	/	choyh258@seoul.go.kr	/	대시민공개