문서번호	정수시설과-1144
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	06/13 김동기
협조
	주무관		최양교

배출수처리장 구내 회수배관 개량공사

준 공 기 한  연 기 보 고

2014. 06.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

배출수처리장 구내 회수배관 개량공사

준 공 기 한  연 기 보 고

우리 정수센터 「배출수처리장 구내 회수배관 개량공사」를 매립구간 개량공사와 동시에 진행하여 회수공정 차질을 최소화하기 위해 준공기한을 연기함.

Ⅰ		사업 개요

☐ 공 사 명 : 배출수처리장 구내 회수배관 개량공사

☐ 공사개요 : 배출수처리장 지하1층 회수배관의 관경 축소

(Φ800mm → Φ400mm , 총 22.8m구간)

☐ 계약금액 : 금25,034,000원

☐ 계약기간 : 2014.05.26. ~ 2014.06.19.

Ⅱ		변경 사유

☐ 당 공사의 회수배관 철거·설치를 위하여 회수배관 퇴수, 작업진행 중

역세척이 불가하므로, 진행중인 「회수배관 매설구간 개량공사」와 동시        추진하여 회수공정 운영차질을 최소화할 계획이며,

☐ 최근 잦은 강우로 매설구간 개량공사 일정에 차질이 발생하여, 배관        퇴수 및 철거 일정이 지연되어 준공기한을 연장하고자 함.

☐  준공기한 변경 : 당초 2014.06.19. ▶ 변경 2014.06.30.

Ⅲ		행정 사항

☐ 해당업체 합의서 징구 및 계약부서에 통보하여 계약내역을 변경함.

○ 준공기한 원안 : 2014.06.19.

변경 : 2014.06.30.

○ 귀책소재 및 사유 : 우리 정수센터(타 공사와 연계 진행을 위한 연기)

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 업체 합의서(준공기한 연기) 1부.  끝.