문서번호	시설관리과-1654
결재일자	2014.6.13.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		한강사업본부장
유충현	김상언	차광재		06/13 한국영
협 조
	총무과장		최대봉

한강 지천교량 개선사업 추진계획 보고

2014. 6

시 설 부

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

한강 지천교량 개선사업 계획수립 보고

‘09년 정밀안전진단 결과 안전이 미 확보된 탄천교(D등급)와 보수가 필요한일부 교량(중랑천교, 안양천교)은 한강 르네상스 사업과 연계되어 조치계획에서 제외되었으나, 한강주운계획 등이 취소 됨에 따라 제외된 교량 등에 대해 공사계획을 수립 시행하여 이용시민 안전을 확보코자 함

▢ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 : 한강지천횡단교량 진단(8개소)

- 대 상 :  성내천, 중랑천, 반포천, 봉원천, 욱천, 홍제천, 안양천교

▢ 추진경위

○‘09. 3.16 ~‘09.11.6 : 지천횡단교량 8개소 정밀안전진단 용역 준공

○‘09.12.30 ~‘13.4.30 : 교량 5개소 신설 설치완료

- 신설교량(5개소) : 성내천교, 반포천교, 홍제천교, 욱천교, 봉원천교

- 제외교량(3개소) : 탄천교, 중랑천교, 안양천교

시설명	형 식 (제 원)	안 전 등 급	진 단 결 과	시행
성내천교	BOX교 (4×66.5m)	C	․ 내하력 부족, 안전성 미확보, 진·출입 선형불량 ․ 유지관리상 문제 등으로 신설필요	신설완료
탄천교	연속라멘교 (6×100m)	D	․ 내하력 부족과 안전성 미확보, 침수 빈번함 ․ 잠실워터플랜트와 연계하여 향후 철거후 신설 계획	제 외
중랑천교	RC슬라브교 (4×159.7m)	A	․ 안전은 확보되었으나, 이용불편개선 ․ 한강주운계획에 따라 철거 계획 임	제 외
반포천교	RC라멘교 (5×84m)	D	․ 내하력 부족과 안전성 미확보, 침수 빈번함	신설완료
봉원천교	연속라멘교 (4.4×70m)	A	․ 홍수시 여유고 부족으로 잦은침수와 교량협소로 공원이용시민 불편 ․ 안전은 확보되었으나, 이용불편개선 ․ 안전사고 예방등 신설필요	신설완료
욱천교	연속라멘교 (4.4×74m)	A	․ 홍수시 여유고 부족으로 잦은침수와 교량협소로 공원이용시민 불편 ․ 측면에 보행육교설치시 유지관리 어려움	신설완료
홍제천교	연속라멘교 (6×62.1m)	D	․ 내하력 부족, 종단경사 급해 안전사고 위험, 침수빈번함	신설완료
안양천교	연속라멘교 (6×228.2m)	B	․ 안전성 확보 및 폭원(6m)축소로 산책로 최소 확보 ․ 한강주운계획에 따라 철거 계획 임	제 외

▢ 제외된 교량 조치방안

○ 한강르네상스 계획(잠실워터플랜트, 한강주운계획 등)이 취소됨에 따라 이와 연계되어 신설교량(안전 미확보)계획에서 제외된 탄천교는 기존 교량을 철거후 신설(‘15년)하는 것으로 추진코자 하며,

위 치	현황사진	시설물개요
		시설명 : 탄천교 ‧ 시설규모 - B=6m, L=100m · 계획고 : 6.40m · 홍수위 : 11.11m (여유고 부족)

○ 중랑천교, 안양천교 2개 교량에 대해서는 구조물 안전은 확보되었으나, 교량상에 설치된 일부 시설물(보행데크, 균열 등)은 교체 및 보수 ․ 보강하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

▢ 향후 추진계획

○ 추진일정

-‘14. 7 : 투자심사 시행

-‘14. 9 : 실시설계비 추경예산 반영

-‘14. 10 ~‘15. 4 : 실시설계 시행

-‘15. 4 ~ 12 : 교량신설 및 보수 ․ 보강시행

○ 예산확보 방안

- 소요예산(약 50억원)에 대해서는 추경예산(설계비)확보 및‘15년 예산(공사비)에 반영하여 시행코자 함

구 분	계 (백만원)	2014년 추경	2015년
계	5,000	150	4,850
설 계 비	150	150	-
시 설 비	4,850	-	4,850

첨 부 : 지천교량 신설(5개소)현황 1부.  끝.