함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2014년도 서초역~교대역간 배수관 부설공사)

우리사업소에서 시행완료 한 『2014년도 서초역~교대역간 배수관 부설공사』에 대하여 설계변경 심의를 개최하고 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공  사  명 : 2014년도 서초역~교대역간 배수관 부설공사

나. 공사  개요 : D=100~500mm, L=742m

다. 계약상대자 : 빛샘건설(주) 대표 장석균

라. 계약  기간 : 2014. 4.14~7.22

마. 변경  사유 : 공종별 계약물량 증감 및 신규공종 발생

바. 예산   과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후송배수관정비)

사. 변경   금액

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감		비고
총공사비		770,918,600	768,165,000	감) 2,753,600
도급액	공급가액	287,493,273	284,990,000	감)	2,503,273
	부 가 가 치 세	28,749,327	28,499,000	감)	250,327
	계	316,242,600	313,489,000	감)	2,753,600
관급자재비		200,000,000	200,000,000		변동없음
복구비 및 기타		254,676,000	254,676,000		변동없음

붙 임 : 1. 설계변경 심의 보고 및 의견서 각 1부.

2. 설계변경 내역서  1부.

3. 제비율검증 1부.

주무관	김영규		주무관	윤복철		시설관리과장	원의덕		강남수도사업소장	06/24 代김영철
협조자	주무관	유명수		주무관	김미옥
시행	시설관리과-13508	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	대시민공개