투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	“두모교 외 1개소 내진성능개선공사 책임감리용역” 변경계약 요청

1. 우리사업소에서 시행중인 “두모교 외 1개소 내진성능개선공사 책임감리용역’의 변경계약을 아래와 같이 요청 드립니다.

ㅇ 사 업 명 : 두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역

ㅇ 변경내용 : 계약기간 연장

- 당초 : 2013. 6.12 ~ 2014. 7.11

- 변경 : 2013. 6.12 ~ 2014. 8.31

ㅇ 용 역 비 : 358,153천원 (변경 없음)

ㅇ 시 행 자 : 신명건설기술공사(주)

ㅇ 준공기한 연기사유

- 동절기 공사 중지에 따른 책임감리 과업 일시중단 (42일)

- 두모교 내진성능개선공사의 준공기한 일정에 맞추어 기간연장 (9일)

따로붙임 : 1) 준공기한 연기보고서

2) 준공기한 연기요청서(책임감리).  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	정상모		교량보수과장	06/24 구현모
협조자
시행	교량보수과-3893	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울시 마포구 가양대로 203	/
전화	300-8451	/전송	300-8459	/	akma@seoul.go.kr	/	대시민공개