문서번호	토목부-12195
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	06/26 노우성

교통관리 변경계획 용역비 검토보고 (선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

교통관리 변경계획 용역비 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

4차로를 임시 개통하여 운영 중이나 강동구 및 인근 주민들로부터 횡단보도 신설, 보행신호등 설치요구가 있어 서울지방경찰청 교통규제심의자료 작성을 위한 교통관리 변경계획 용역이 필요하여 이에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 4차로 임시개통에 따른 교통소통관리 변경계획비 실정보고 (선사고덕0420-332호, ‘14. 6.3.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1.06. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 115,048백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

□ 보고내용

○ 실정보고 이유

- 4차로 임시개통에 따른 암사동, 고덕동 일대 횡단보도 및 보행자 신호등 설치 요청 민원에 따른 서울지방경찰청 교통규제 심의자료 작성을 위한 용역비 반영 실정보고임.

○ 단가검토

- 낙찰률 81.14%

- 강제협의율=(설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가+동 단가에 낙찰률 곱한 금액)/2

= (100 + 81.14) / 2 = 90.57%

- 용역비 산출 내역

(단위 : 원)

공 종	견 적 서			적용방안	비고
	A사	B사	C사
공사중 교통관리계획비 (임시개통)	7,700,000	8,000,000	7,000,000
협의률 적용 (90.57%)	6,970,000	7,240,000	6,340,000	C사 견적금액 적용

○ 공사비 증·감현황

(단위:원)

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비고
순공사비	식	-	-	-
제 잡 비	식	-	-	-
소 계		-	-	-
공사중 교통관리계획 용역비	식	-	6,340,000	6,340,000
부 가 세	식	-	634,000	634,000
도급공사비		-	6,974,000	6,974,000

□ 감리단 검토의견

○ 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례(2007.01)에의거 4차로 임시 개통에 따른 민원 및 강동구청 요구사항의 교통소통대책 수립에 따른 서울지방경찰청 규제심의자료 작성을 위한 용역비 반영 실정보고 사항임.

○ 교통소통대책수립 대행 전문기관의 견적서중 최저금액을 제시한 업체 6,340,000원(협의율적용, 부가세별도)로 적용함.

○ 검토결과 공사계약 일반조건 Ⅵ.공사설계의 변경  1.설계변경 “가‘’ 항목중 4) 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우를 근거로 하여 추후 설계변경함이 적정하다고 사료됨.

□ 조치계획

○ 감리단 검토의견과 같이  서울지방경찰청 교통규제 심의 자료 작성을 위한 교통관리 변경계획 용역비 반영은 필요함.

○ 증액되는 공사비 6,974천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 :  감리단 검토의견서 1부.  끝.