투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행[2014년 교통사고 잦은곳 교통신호기공사]

1. 기전과-6634호(2014.07.18)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 교통사고가 빈번한 교차로의 개선을 위해 추진한 교통신호기공사에 대하여 책임감리사로부터 설계변경(정산) 서류가 접수되어 검토한 바 적합하여 설계변경(정산)을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 교통사고 잦은곳 교통신호기공사

나. 공사기간 : 2014. 5. 30 ~ 2014. 9. 30

다. 시공업체 : 경진종합전력(주) 대표 유만수

라. 공사금액 : 금16,960,500원

마. 설계변경 내용

❍ 공사금액 변경                                            (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	16,960,500	17,157,000	196,500(증)

❍ 설계변경 사유 : 당초 설계도서(내역서/도면)와 현장여건과 상이한 부분에   대한 물량 증·감 및 제경비 등 정산에 따른 설계변경 필요

바. 예산과목 : 기전과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화,                            교통사고 잦은곳개선, 시설비및부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 방침서 1부.

2. 설계변경(정산) 보고(감리사) 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 제비율검증서 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

주무관	박신범		기전과장	07/18 정윤식
협조자	주무관	박경우		관리단속과장	정수현
시행	기전과-6647	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5472	/전송	02-945-5074	/		/	대시민공개