문서번호	정수시설과-1596
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이무규		박심근	07/22 오세영
협조

2015년도

자동제어설비 유지관리용역 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2015년도

자동제어설비 유지관리용역 계획(안)

정수시설 자동제어설비를 전문업체와 유지관리용역 계약을 체결하여 안전하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		자동제어설비 개요

□  설치년도 : 2012 ~ 2014년

□  설치업체 : ㈜대우

□  설비 현황

○ 서버 : 2대(제어실)

○ 제어용 컴퓨터 : 7대(제어실 4, 시험실1, 계측기실1, 탈수기동1)

○ 현장제어반 : 27대(약품투입동 2, 여과지동 2, 오존점촉지동 1, 탈수기동 1, 염소투입동 1, 송수펌프동 13, 배출수지동 1, 침전지 6)

○ 기타 : 통신설비, 각종 계측기 전송설비 등

Ⅱ		자동설비 설비 용역 필요성

□ 유지관리용역 근거

○ 본부장 방침 제95호(‘08.2.25)호

- 자동제어설비 안정적 운영방향 모색을 위한 유지관리 업무개선

연간단가 계약 추진계획

○ 기전설비과-1068(‘08.3.6)호 “자동제어설비 연간단가 시행 철저”

□ 용역 필요성

○ 제어설비 시스템은 24시간 상시 가동되어 주기적인 시스템 동작 상태를 정밀점검 및 보완이 필요하고 현장설비의 신・증설시 프로그램의 부분수정 등의 업무처리 시 동 업체에 의뢰할 수 없어 담당자가 조치하여야 하나 전문성 부족으로 조치가 불가하므로

○ 주기적인 시스템 동작 상태 정밀점검으로 시스템 장애 및 사고를 미연에 방지하고 천재지변 등으로 인한 긴급상황 발생시 신속한 복구를 위하여 전문업체로 하여금 제어설비의 관리가 필요하므로 설비 인수 후 2015년 하반기부터 용역관리 시행

〈최근 준공한 정수센터 용역 현황〉

구분	영등포정수센터		광암정수센터	비고
	1공장	2공장
준 공 일	2011. 12	2010. 3	2012. 12
용역시행	2012년~	2013년~	2014년~
계약금액	57,000천원		55,000천원	2014년

Ⅲ		2015년도 유지관리 계획(안)

□ 용역기간 : 2015. 7 ~ 12(하반기)

□ 소요예산 : 24,200천원

□ 예산과목 : 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 점검주기 : 분기 1회(매월 전체 설비의 1/3씩 안분하여 실시)

□ 과업내용

○ 제어용 PC, 현장제어반, 서버 등 시스템 동작상태 점검

○ 통신서버 및 네트워크 동작상태 점검

○ 수위계 등 계측기 전송상태 등 주변기기 점검

○ 장애 및 사고 발생시 긴급출동 등

□ 추진일정

○ 2014. 7월        : 2015년 예산편성

○ 2015. 5월 ~ 6월  : 발주 및 계약

○ 2015. 7월 ~ 12월 : 용역 시행.  끝.