문서번호	도시철도설비부-7118
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장
김기중	代박종회	08/04 정찬웅

9호선 2단계 건설구간 시운전 상황보고(2014.8.1)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 일일 시운전 상황 보고

2014.8.1.(금)

□ 금일실적

급전	단전	시험시간
09:05	17:25	09:00~17:10

○ 시험 내용

- 926~930 PSR(기준속도) 지점 및 값 확인

- 926~930 구간 및 신호 정차지점 확인

· MCS모드 30km/h로 상향속도 운행

· 구간정차 21개소, 신호정차 1개소 확인

○ 참여인원 : 13명 (본부 : 5명, 시공사 : 4명, 감리 : 1명, 기관사 2명, 운영사 1명)

※상황실 및 신호시험 : 황영일, 김기중, 김창환, 이진근, 배종수

□ 본선 출입승인

일자	분야	회사명	작업구간	작업내용	작업인원	비고(공구)
8.2	자동제어	한산CPS	928~929	자동제어 자재 운반	한사용 외 3명	916
8.2~3	토목	GS건설	31K940 부근	승강장 하부 청소	안태수 외 9명	917
8.2	건축	영부건설	928~929	금속공사 자재 이동	이재용 외 4명	916
8.2~3	토목	경남기업	926정거장	터널 시점부 물청소	최서범 외 4명	915

□ 기타

○ 시운전 차량 이동

- 17:20 : 1단계 구간으로 이동

□ 8.4.(월) 시험계획

○ ATC 고속시험

- 925~926 역진행구간 PSR 지점 및 값 확인

- 궤도연속 전송신호 수신 확인.   끝.