문서번호	도시철도설비부-7260
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정보통신과장	도시철도설비부장
김기중	代박종회	08/06 정찬웅

9호선 2단계 건설구간 시운전 상황보고(2014.8.5)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시철도설비부

9호선 2단계 연장구간 일일 시운전 상황 보고

2014.8.5.(화)

□ 금일실적

급전	단전	시험시간
08:52	16:48	09:00~17:00

○ 시험 내용

- ATC 고속 기능시험

· 진행구간 PSR 지점 및 값 확인

· 구간 및 신호 정차지점 확인

※ MCS모드 50Km/h로 상향속도 운행

○ 참여인원 : 12명 (본부 : 4명, 시공사 : 4명, 감리 : 1명, 기관사 2명,                    운영사 1명)

※ 상황실근무자 및 신호시험자 : 박종회, 김기중, 전계목, 김종옥

□ 본선 출입승인

일자	분야	회사명	작업구간	작업내용	작업인원	비고
				해당사항 없음

□ 기타

○ 노반 및 레일에 결로현상 계속

○ 시운전차량 927정거장 상선 주박

□ 8.6.(수) 시험계획

○ ATC 고속운행시험

- 진행구간 PSR 지점 및 값 확인 계속

- 구간 및 신호 정차지점 잔여구간 확인 계속

- MCS모드 50Km/h로 상향속도 운행.  끝.