문서번호	원수관리과-1461
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김향석		손주옥	08/08 代임건혁
협조

배전반 제작구매 설치 납품기한 연기 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2004. 8.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

배전반 제작구매 설치 납품기한 연기 검토

「강북취수장 배전반 제작구매 설치」와 관련하여 납품기한 연기사유가 발생함에 따라 아래와 같이 납품기한 연기를 검토 보고드림.

□ 계약현황

○ 사 명 업 : 강북취수장 배전반 제작구매 설치

○ 계약기간 : 2014. 5. 22 〜 9.19

○ 계약금액 : 50,498,000원

○ 계약업체 : ㈜일산전기

○ 계약물품내용

- 고압기동반 1면, 고압콘덴서반 1면, 현장제어반 1면, 운반 및 설치 1식

□ 납품기한 연기검토

○ 연기사유

- 병행공정인「강북아리수정수센터 강북계열 취수펌프 제작설치」와 납품기한 불일치

※ 취수펌프 제작설치 준공기한은 2014.11.11.일으로 수배전반 납품기한과 차이가 발생, 이러할 경우 먼지 설치한 시설(물품)의 시험운전이 곤란하므로 수배전반 납품기한을 연기하여 상호 동시에 운전이 이루어지도록 납기 조정

○ 변경내역

납품기한		지체상금	비 고
변 경 전	변 경 후
2014.9.19	2014.11.11	미부과	책임소재 우리센터

□ 행정사항

○ 행정관리과에 납품기한 연기요청. 끝.