투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	서 울 특 별 시 장(공원조성과장)
(경유)
제목	남산 회현자락(3단계) 한양도성 추가 발굴조사에 따른 사업비 재배정 요청

1. 공원조성과-9171(2014. 8.4)호 및 조사연구과-3098(2014.8.6.)호, 조사연구과-3184(2014.8.12)호와 관련입니다.

2. 남산 회현자락 정비(3단계)사업 추진과 관련, 한양도성 추가 발굴조사에 따른 우회 산책로 개설 및 지장수목 정비에 필요한 사업비를 재배정 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 한양도성 추가 발굴구역내 우회 산책로 개설 및 지장수목 정비

나. 위    치 : 중구 회현동 산1-2일대

다. 사업내용

- 우회 산책로 개설(목재계단) 100m (B 2.4 × L 100)

- 지장수목 정비 1,210주(제거 10주, 관목이식 1,200주)

라. 사업기간 : 2014. 8 ∼ 2014. 9

마. 소요예산 : 160,000천원.  끝.

	중부공원녹지사업소장
주무관	남상국		시설과장	08/12 함석주
협조자
시행	시설과-5653	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02) 3783-5972	/전송	02) 3783-5969	/	namsg8535@seoul.go.kr	/	대시민공개