문서번호	도로보수과-7434
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최정필		08/14 이규철
협조
	주무관		이상하

2014년 불량맨홀 정비공사 설계변경(1회) 시행계획 보고

2014.08.

2014년 불량맨홀 정비공사

설계변경(1회)에 따른 보고

2014년 불량맨홀 정비공사 공사업무 수행 중 설계변경 사유가 발생하여

공사 시행에 만전을 기하고자 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 불량맨홀정비공사(연간단가)-서부

○ 공사기간 : 2014.03.28 ∼ 2015.02.28.

○ 계 약 자 : 대실테크(주) 대표 유조웅

○ 도 급 비 : 525,613,000원

□ 설계변경 사유

○ 도급비 및 공종의  변경없이 현장 여건에 따른 맨홀 보수 수량만 변경하여       공사 시행에 만전을 기하고자 함.

□ 변경내용(당초 498개소 → 변경 522개소, 증 : 24개소)

공 종	규 격	당 초(개소)			변 경(개소)			비고
		계	주간	야간	계	주간	야간
		498	154	344	522	57	465
불량맨홀 보수	하수 D648	75	25	50	120	16	104
	상수 D648	175	50	125	98	10	88
	통신 등 D766	75	25	50	117	9	108
	통신 등 D918	75	25	50	90	6	84
	통신 등 D1108	65	15	50	31	5	26
	통신 등 사각 1080×580	18	5	13	30	5	25
	소형 D250	15	9	6	36	6	30

따로붙임  1) 설계변경 내역서 1부. 끝.