문서번호	급수운영과-20158
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
김선찬	代강무진	유동수	10/05 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

『2021년 광진구 관내 상수도공사』

차수별 금액변경 시행계획 보고

2021. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 광진구 관내 상수도공사』

차수별 금액변경 시행계획 보고

「2021년 광진구 관내 상수도공사」의  현장여건 변화 등으로 시공물량 증가하여 1차수 계약금액이 소진된 바, 차수별 금액변경 시행계획을 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명: 2021년 광진구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자: **************

○ 도급금액: *************

○ 공사기간: 2021. 4. 19. ~ 2022. 3. 31.

○ 공사규모: D=80~300mm, L=810m

차수별 금액변경 내용

○ 차수별 금액변경 사유

- 1차수 토공, 부설공 등 시공물량 증가에 따른 1차수 계약금액 부족

○ 차수별 금액 세부내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1차	************	*************	***************
2차	************	************	***************

공사비 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
****	************	*************	-

향후 계획

○ 차수별 계약금액 변경시행하여 행정지원과로 변경계약 의뢰. 끝.