다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	양천구청장(복지정책과장)
(경유)
제목	2014년도 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경요청 검토결과 통보

1. 양천구 복지정책과-20132호(2014.8.12.) 및 시 복지정책과-21391호(2014.8.27.)와 관련된 사항입니다.

2. 2014년도 기능보강사업 추진과 관련하여 사업계획 변경 요청에 대한 검토 결과를 다음과 같이 통보합니다.

○ 변경요청 및 검토의견

(단위:천원)

시설명	사업명	변경전				변경후				변경사유	검토의견
		계	시비	구비	자부담	계	시비	구비	자부담
신정 복지관 (양천구)	승강기 교체공사	56,900	34,140	22,760	-	52,480 (△4,420)	31,488 (△2,652)	20,992 (△1,768)	-	승강장 노후벽면 노출로 인한 미관 저하 및 승강기 내부 거울 부재 등 이용자 편의 고려	“승인”
		- 승강기 교체 : 기존 56,900천원 → 50,500천원(6,400천원 감소) - 승강장 벽면 도색 및 내부 거울 설치(추가) : 1,980천원 증가

붙  임 : 검토결과(양천구-신정).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이광훈		복지시설팀장	오은미		복지정책과장	08/27 엄의식
협조자
시행	복지정책과-21454	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-7355	/전송		/	kwang92@seoul.go.kr	/	대시민공개