등록번호

토목과-16906

주무관

도로관리팀장

토목과장

안전건설교통국장

부구청장

등록일자

2021.11.29.

박성봉

김균성

강우균

함명수

11/29

김진만

결재일자

2021.11.29.

공개구분

부분공개(5)

협  조

설계변경(정산) 검토 보고

[2021년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)]

서 대 문 구

토목과

설계변경(정산) 검토 보고

『2021년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)』와 관련하여 주민민원 및 현장여건 반영 등으로 계약물량 변경(최종)을 위한 설계변경(정산) 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 토목과-11754호(2021.8.11.) : 낙찰차액 사용 계획 보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 2021년 관내 포장도로 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2021. 3. 2. ~ 12.31.

○ 공 사 비 : 금2,649,769,000원

(도급비 1,839,607,000원, 관급비 810,162,000원)

○ 공사규모

- 아스콘 포장 419a, 소규모포장 복구 62a, 도로경계석 설치 2,501m

빗물받이 정비 100개소

○ 도 급 자 : *************

Ⅲ		추진경위

○ ’21. 3. 2. : 공사착공

○ ’21. 3. 3. ~ 11.10. : 작업지시 및 공사완료(제1차~제6차)

Ⅳ		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

○ 민원처리(구의원, 응답소, 전화민원 등) 및 현장여건 반영에 따른 단순 물량 증감 발생

○ 홍은도담도서관 ~ 마을버스 종점구간 노후포장도로 정비에 따른 추가 물량 발생[낙찰차액 사용계획 방침,토목과-11754호(2021.8.11.)]

○ 건강보험료, 연금보험료. 환경보전비 등 각종 경비 정산

○ 고용개선지원비(주휴수당, 보험료, 장려금, 단말기) 정산 등

□ 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비		2,435,680,640	2,649,769,000	증 214,088,360
도급비	공급가액	1,524,623,455	1,672,370,000	증 147,746,545
	부가세	152,462,345	167,237,000	증 14,774,655
	계	1,677,085,800	1,839,607,000	증 162,521,200
관 급 비		751,826,420	810,162,000	증 58,335,580
이 전 비		6,768,420	-	감 6,768,420

□ 주요공종 물량 변경내역

공 종	단 위	당 초	변 경	증․감	비 고
아스콘포장	@	372	419	증 47
소규모포장 복구	@	56	62	증 6
도로경계석 설치	m	1,790	2,501	증 711
빗물받이 설치	개소	87	100	증 13

Ⅴ		조치계획

○ 상기 내용과 같이 추가작업에 따른 물량 증․감에 대하여 설계변경(3회 최종)을 시행하여 본 공사를 정산(준공)하고자 함.

붙임 1. 낙찰차액 사용계획 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 검증확인서 1부.  끝.