문서번호	주차계획과-12168
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주차시설팀장	주차계획과장
고광호		김종상	09/17 안석진
협조

고척근린공원

지하주차장 건설 예산 배정 검토

2014. 9.

고척근린공원 지하주차장 건설배정 검토

구로구로 부터 주차장 건설을 추진하고자 ’14년도「고척근린공원 지하주차장 사업」에 편성된 사업비 배정 요청에 따라 예산 배정여부를 검토하는 사항임.

Ⅰ. 사업개요

○ 위    치 : 구로구 고척동 산9-14

○ 규     모 : 지하2층, 지상1층(대지면적 : 3,189.24㎡, 연면적 : 6,819㎡, 199면)

○ 총사업비 : 11,348백만원(시비 6,630백만원, 구비 4,718백만원)

○ 사업기간 : 2010. 6. ~ 2015. 12.

Ⅱ.  그간 추진 경위

○ ’12. 3 : 투자심사 완료(적정)

○ ’12.10. ~ ’13. 6 : 기본 및 실시설계용역

- 용역업체 : (주)동명기술공단, (주)선진엔지니어링

○ ’13.04.30 : 이식목 생육환경개선공사 준공

○ ’13.05.09 : 도시계획시설 변경결정 및 지형도면 고시

○ ’13. 6.25 : 도시계획시설사업(주차장) 실시계획인가

○ ’13.07.23 : 기본 및 실시설계 VE제안서 작성용역 준공

○ ’13.12.26 : 기본 및 실시설계용역 준공

○ ’14.02.10 : 서울시 계약심사 완료

○ ’14.02.21 : 구 계약심의위원회 개최

○ ’14.02.24 : 지장수목 이식공사 시행

- 시공업체 : ㈜삼일기업공사 외1(공사기간 : ’14.3.24 ~ 4.23)

○ ’14.03.03 : 건설공사(토목․건축․소방·기계설비) 발주

- 시공업체 : (주)삼일기업공사 외1 (공사기간 : ’14.4.23 ~ ’15.12)

○ ’14. 10. : 공사(전기.통신.조경 등) 발주 예정

Ⅲ. 세부 검토 내역

□ 분야별 공사개요

단위 : 백만원

구 분		사업비	공사비		시공업체	공정율	비고
			시비	구비
계		11,348	6,630	4,718
설계용역(’13.12)		298	-	298	동명기술공단	완료
토목. 건축 공사	소계	9,098	5,459	3,639	㈜삼일기업공사	14%	’14. 3. ~ ’15.12
	토목	3,750	2,250	1,500
	건축	3,089	1,853	1,236
	조경,기계	344	207	137
	관급자재	1,915	1,149	766
전기.통신 공사	소계	1,952	1,171	781	’14.10 발주 예정	-	’14.10. ~ ’15.12
	전기	562	553	9
	통신	126	75	51
	기계,소방	212	179	33
	조경	474	-	474
	관급자재 등	578	364	214

□ 고척근린공원 지하주차장 예산배정

○ 관련공문 : 2014년 주차장 건설사업(고척근린공원 지하주차장) 예산배정  요청(구로구 주차관리과-17031, 2014.8.05)

○ 사업비 배정 현황(자치단체 자본보조)

(단위 : 백만원)

구 분	계	12년	13년	14년			15년 이후	비고
				계	기배정	금회배정
계	11,348	298	5,000	6,050	5,235.675	814.325
시 비	6,630		3,000	3,630	2,815.675	814.325	-
구 비	4,718	298	2,000	2,420	2,420	-	-

○ 공사발주 현황

- ’13. 12. : 용역설계 완료

- ’14.  3. : 토목, 건축공사 등 발주

- ’14. 10. : 전기, 통신공사 등 발주 예정

○ 요청 사유

- 공사(전기,통신 등) 발주시기 도래에 따른 배정 요청

○ 검토 의견

- 고척동 “고척근린공원 지하주차장” 건설 관련하여 실시설계용역과 계약심사 완료하고, 현재 토공사 추진 중으로 향후 전기. 통신 공사를 시행하고자

- ’14년 편성된 시비 814,325천원을 요청하는 사항으로 공사가 원활하게   이루어질 수 있도록 배정함이 타당하다고 사료됨

붙임 : 관련서류 1부.(별도)