문서번호	도로보수과-8599
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		09/25 이규철
협 조
	주무관		이상하

2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사

집행잔액 사용계획 및 작업지시 관련 보고(제4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
시설보수과-6972				23,000천원

2014.  9. 25(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사

집행잔액 사용계획 및 작업지시 관련 보고(제4차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전(도로)부속물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 해마건설(주) 대표 송흥섭

○ 도 급 비 : 74,824,000원

□ 집행잔액 검토내용

○ 상기 공사시행 중 기 작업지시한 물량이 공사계약 금액에 근접할 뿐만 아니라「2014년 가을맞이 도로시설물 청결대책 추진계획」에 따라 교통안전(도로)부속물 세척 및 민원사항 증가 등에 따른 소요예산 부족으로 시설물 유지관리에 어려움이 있음.

※ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	예산액	기 집행액		집행잔액		공정(%)
		도급	관급	낙찰차액	집행잔액
교통안전(도로) 부속물 유지보수	119,657	74,824	44,833	9,632	18,698	71

□ 집행잔액 사용계획

○ 해당 사업의 낙찰차액을 안전사고 예방을 위한 시설물 유지관리 및 민원사항 등의 처리에 소요되는 공사비로 사용코자 함.

※ 도급비 사용 예정액

(단위 : 천원)

공 사 명	예산액	낙찰차액	집행잔액	사용예정액	비 고
교통안전(도로) 부속물유지보수	119,657	9,632	18,698	28,330

□ 작업지시 보고내용

○ 무단횡단금지시설, 시선유도봉 세척 청소

- 쾌적하고 깨끗한 도로환경 조성을 위한 「2014년 가을맞이 도로시설물 청결대책 추진계획」(시설보수과-6972, 2014.09.12)에 의거 세척 시행.

□ 조치계획

○ 추가 예산사용분(낙찰차액)에 대하여 설계변경을 시행하여 도급비에 반영 동절기 이전에 작업을 완료하여 품질관리에 만전을 기하고자 합니다.

○ 위와 같이「2014년 가을맞이 도로시설물 청결대책 추진계획」에 따라 교통안전(도로)부속물 세척 작업을 실시하여 쾌적한 도로 환경을 제공코자 함.

- 건    명 : 교통안전(도로)부속물 유지보수공사 작업지시(제4차)

- 작업위치 : 마포로 외 4개 노선

- 작업기간 : 2014. 09. 25 ~ 2014. 10. 20

- 필요금액 : 약 23,000천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량

▸교통안전시설물(무단횡단금지시설) 세척 : 3,234㎡

▸교통안전시설물(시선유도봉)       세척 :  103개

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	도급비	기 집행액	금회 집행액 (4차)	집행잔액
교통안전(도로) 부속물 유지보수	84,456	56,126	23,000	5,330

붙 임 : 1. 작업지시 내역서(제4차) 1부.

2. 위치도 및 현황사진(제4차) 각 1부.

3. 관련 문서 1부.  끝.