문서번호	설비부-10533
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	이흥복	09/25 代권오식

『남부순환로~오정대로 도로개설 전기·신호공사』

3차 계약 및 준공기한(총차) 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  9.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『남부순환로~오정대로 도로개설 전기·신호공사』

준공기한 연기 검토 보고

『남부순환로 ~ 오정대로 도로개설 전기 및 신호공사』 시행 중 선행공종인 토목공사 준공기한 연기에 따라 전기 및 신호공사 준공기한을 연기하고자 함.

검토근거

❍ ㈜ 수성엔지니어링 수성 제2014-3398(2014.09.23.)호

- 전기 및 신호공사 설계내역서(3차) 제출

❍ ㈜ 수성엔지니어링 천호수 제2014-559(2014.09.23.)호

- 공사기간 연기 요청(전기 및 신호공사)

공사개요

❍ 공 사 명 : 남부순환로 ~ 오정대로 도로개설 전기 및 신호공사

❍ 규    모 : 도로개설 1,230M 구간내 가로등주 97본, 신호등 47조 설치

❍ 공사기간 : 2010.11.29 ~ 2014.10.07.(총차)

❍ 도 급 비 : 620,082천원(총차)

❍ 시 공 사 : (주)삼구전력 대표 황희숙

❍ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링

3차 계약

❍ 공사내용 : 가로등 설비공사, 교량BOX조명설비, 교통설비 1식

❍ 공사기간 : 2014.09.29.~2015.06.30.(274일)

❍ 도급공사비 : 80,000,000원(부가세포함)

- 공사비 현황

구 분	총 차	1차	2차	3차 (금회계약)	잔여공사	비 고
계약금액	620,082,440	-	-	80,000,000	540,082,440

준공기한 연기

❍ 연기사유 : 선행공종인 토목공사 지연으로 후속공정인 전기공사의 실 착공이 지연되어 준공기한 연기 필요함

❍ 연기 내용

차 수	당 초	변 경	비 고
총 차	2010.11.29 ~ 2014.10.07	2010.11.29 ~ 2015.12.30	449일 연기

❍ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

처리의견

❍ 상기와 같이 공정 진행을 위하여 3차수 계약을 의뢰하고,

❍ 선행공정인 토목공사의 공정에 맞쳐 전기 및 신호공사 총차 준공기한을 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 전기 및 신호공사 설계내역서(3차) 제출 공문 1부.

2. 3차수 설계내역서 1부.

3. 공사기간 연기요청 공문 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.