투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	준공대비 건축 선행공정 조속추진 업무지시

1.문서번호 : SMIH-14-38609

2.작성일자 : 2014-09-26 10:09:38

3.제    목 : 준공대비 건축 선행공정 조속추진 업무지시

4.내    용 :

1. 14.9.23(화) 장충체육관 현안사항에 대한 공정회의시 본부장 당부사항와 같이 금년말 차질없는 준공을 위해 건축, 설비(기계,전기,통신)공정간 유기적인 협조가 절실한 시기입니다.

2. 이와 관련, 건축 선행공사 완료 이후 설비분야는 공사시행, 각종 장비 및 시스템 조정, 시운전 시행 등 많은 기간이 소요됨에 따라 다음사항을 조속히 완료하여 후속공정 추진에 차질이 발생치 않도록 조치하시기 바랍니다

-  다  음 -

가. 중앙통제실, 기계실, 전기실 등에 주요기능실 건축마감   (중앙통제실 이전, 각실의 벽체 및 바닥 마감)

나. 복도, 천정, 각실의 마감계획 조속확정 및 천정 설치

다. 화장실 벽체 및 바닥마감

라. 에스컬레이터, 엘리베이터 건축 마감 및 잔여공사

마. 도시가스 인입을 위한 토목공사 이행. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							이종근			열빛총괄과장					09/26 권오식
협조자
시행			설비부-10569									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길15, 2동 2층(서소문동)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8603						/전송			02-3708-8659					/	keun@seoul.go.kr												/	대시민공개