문서번호	교통운영과-17965
결재일자	2014.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
송시영		유승효	09/26 강진동
협조
	주무관		백바름

기술용역 준공기한 연기 검토 보고(강남)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통운영과

기술용역 준공기한 연기 검토 보고

“교통소통개선 및 횡단보도 확충사업 설계 용역(강남)” 계약  상대자로부터 서울지방경찰청 교통안전시설심의 지연 등에 따라 기술용역 준공기한 연기요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 도화(교통) 2014-A20-0093호(2014.9.25) : 과업연기 요청

□ 용역개요

○ 용역규모

- 교통소통개선사업 : 기본및실시설계 25개소, 모니터링 10개소

- 횡단보도확충사업 : 기본및실시설계 14개소

○ 용역기간 : ’13.3.12~’14.9.30

○ 용 역 사 : ㈜도화엔지니어링

○  용 역 비 : 169,790천원

□ 준공기한 연기내용

○ 준공기한 변경

구 분	도급금액 (천원)	용 역 기 간		비 고
		당 초	변 경
전체	169,790,000	2013.3.12 ~ 14.09.30	2013.3.12 ~ 14.11.28	증59일

※ 도급비 변경없음

□ 검토내용

○ 상기용역 진행중 서울지방경찰청 교통안전시설심의 지연 및 개선지점에 대한 갈등조정담당관실의 민원 조정(봉림교 횡단보도 이설 등) 중에 따라 실시설계가 지연되어 준공기한 연기가 필요한 사항임.

○ 귀책사유 : 우리시

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 기술용역에 대한 준공기한 연기를 시행하여 용역 추진에 차질이 없도록 조치코자 함.

□ 따로붙임

1. 요청공문 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.