문서번호	설비부-11058
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	환경설비과장
변인수	10/08 이달영

설계변경 소위원회 자문 요청

(송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

도시기반시설본부

(설  비  부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호	설비부 -	요청부서	건축설비과	요청일	2014. 10. 13.
공 사 명	송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사
감리개요	공사규모	- 송정펌프장 증설(900HP×2대, 변압기 5,000kVA×2대) - 사근펌프장 증설 (1,600HP×2대, 변압기 5,000kVA×2대, 2,500kVA×1대)
	공사기간	2013.04.12. ~ 2014.12.12.
	감 리 사	㈜동화이엔씨
	설 계 사	㈜동일기술공사, 은세기술
	시 공 사	이천이전력(주)
심의요청 사 유	∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 주요 사유> ○ 사근펌프장 수배전반 추가 이설비용 반영 ○ 사근펌프장 케이블 트레이 교체비용 반영 ○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 <설계변경 금액> ○ 총차 : 1,377,143천원 → 1,469,080천원(증91,936천원)
주 요 변 경 내 용
○ 사근펌프장 수배전반 2면 추가 이설에 따른 설치비용 반영 ○ 사근펌프장 고압, 저압케이블 트레이 분리 및 교체비용 반영 ○ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(1회)
별첨서류	1. 설계변경 자문 자료 1부(별첨).

건 명 : 송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사 설계변경

■ 현 황

계 약 명	송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사		시 공 자	이천이전력(주)
공 사 규 모	- 펌프 900HP×2대, 1,600HP×2대 증설 - 전력공급 및 전기설비 1식	계 약 금 액	1,377,143,992원 (전체공사)				계약일
							2013.04.12
공사기간	2013.04.12. ~ 2014.12.12.	감리자	㈜동화이엔씨			설계자	동일기술공사
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사( ● ), 계속비공사( )				※ 작성자: 변인수 ☎ 3708-8628

■ 설계변경 개요

(단위:천원)

공 종	설계변경개요	변경금액	비고
수변전설비 공사	- 사근펌프장 기동반 2면 추가 이설에 따른 부대공사 반영 등	42,470
전력간선설비 공사	- 사근펌프장 고압, 저압 케이블 트레이 분리 설치 및 기존 트레이 교체비용 반영	19,330
전등설비 공사	- 조명기구 LED 변경 및 추가 설비비용 반영	20,170
물가변동	물가변동에 따른 ESC(1회) 반영	22,544
소 계		104,514
제경비 등		-12,578
설계변경 합계		91,936

■ 설계변경 배경

○ 성동구청 요청에 의한 사업계획 변경

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	⑥,⑩,⑪
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 91,936천원 ② 감액 : 원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	②,⑥,⑦,⑨

※  해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 실정보고

. 2013.08.05. : 사근빗물펌프장 지장물(저압배전반 6면) 이설에 따른 실정보고

. 2014.01.08. : 사근빗물펌프장 노후 케이블 트레이 교체에 따른 실정보고

. 2014.03.18. : 송정 외 1개소 빗물펌프장 조명기구 변경에 따른 실정보고

. 2014.08.18. : 물가변동에 따른 계약금액 조정 신청

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정 자문) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약

끝.