문서번호	기전과-9400
결재일자	2014.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	북부도로사업소장
강운규	정윤식	10/10 이승진

「2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

낙찰차액사용계획보고

2014. 10

북부도로사업소

기전과

「2014년 교통안전시설물(안전표지) 유지보수공사(연간단가)」

낙찰차액사용계획보고

경찰청의 교통규제심의, 노후 표지판 정비 및 긴급출동 등 도로를 이용하는 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 추진하고 있는 교통안전표지 공사에 대해 낙찰차액 사용계획을 수립하고 이를 보고드림.

□ 관련근거

○ 2014. 9. 30 교통안전시설물 재배정 예산 원인행위 및 집행철저(교통운영과)

※ 재배정 예산 품의가능(낙찰차액 포함) 전액 집행 사업추진 지시

□ 사업개요

(단위 : 원)

사 업 명	시공업체	공사기간	계약금액	비 고
2014년 교통안전시설물 (안전표지)유지보수공사	고려유리(주) 대표 김 준 기	2014. 4. 7 ~ 2015. 2. 28	78,145,970

□ 예산현황 및 집행잔액

(단위 : 원)

총 사 업 금 액	계 약 금 액	낙 찰 차 액	비 고
90,000,000	78,145,970	11,854,030	현재 5차 작업진행중

□ 사업추진중 문제점

○ 서울지방경찰청 교통안전시설물 개선요청 - 20개소(작업수량 56매)

- 교통안전시설물 개선설치 통보(하달) (교통관리과-25508)

- 교통안전시설 설치공사 실시설계 완료내역 통보 (교통운영과-18315)

○ 노후된 교통안전표지 정비요청에 따른 작업이 경찰청의 교통규제 심의사항과 더불어 추진되고 있으나 교통안전표지 개선요청이 많아서 공사비가 부족한 실정임.

□ 보고자 검토의견

○ 낙찰차액을 사용하여 사업을 최대한 추진하고 설계변경 정산코자 합니다.

붙임 : 관련 공문(교통운영과) 1부. 끝.