다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	동작구청장(사회복지과장)
(경유)
제목	남부장애인복지관 기능보강사업 변경 검토결과 안내

1. 사회복지과-26661(2014.10.22.)호와 관련입니다.

2. 남부장애인복지관 기능보강사업 변경요청에 대하여 아래와 같이 검토결과를 안내하오니 사업추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 : 남부장애인복지관(동작구)

나. 사업명 : 난방배관교체 공사(주차장 보수공사 추가)

다. 사업비 : 총 421,408천원

라. 요청내역 : 절감예산을 사용하여 화장실 보수공사 추진

(단위:천원)

사 업 명	당초 예산액	변경 예산액	증감(△)	비 고
합 계	421,408	427,109	△5,701	부족 금액 자부담
배관교체공사	421,408	350,007	△71,401	공개경쟁입찰 및 일상감사 등으로 예산절감
화장실 리모델링 및 보수공사	-	20,702	20,702	기 변경 승인
주차장 개보수	-	56,400	56,400	신 규

마. 검토결과

요 청 이 유	검 토 결과
○주차장 노후로 복지관 이용자들의 이동에 불편을 초래할 뿐만 아니라 균열 및 침하 현상으로 침수문제가 발생하고 있어, 주차장 공사를 통하여 복지관 이용자들이 안전하고 쾌적하게 복지관을 이용할 수 있도록 하고자 함	- 이용자 제공을 위한 환경개선공사로 추가 사업비가 소요되지 않고 예산절감액을 사용하는 공사로서 변경요청이 적정함.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김종민		장애인재가복지팀장	김지형		장애인자립지원과장	10/27 고경희
협조자
시행	장애인자립지원과-16319	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 1층(장애인자립지원과)	/
전화	2133-7474(7474)	/전송	02-2133-0722	/	godbachi@seoul.go.kr	/	대시민공개