투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	동대문구청장(토목과장)
(경유)
제목	도로점용(굴착,복구) 허가기간 연장요청(동대문구-2013-기타-21)

1. 「신이문빗물펌프장 증설공사」와 관련하여 도로점용(굴착,복구) 허가된 사항에 대하여 공사기간이 연장되어 아래와 같이 허가기간을 연장신청하오니 이문동일대 침수예방사업임을 감안하시어 처리하여 주시기 바랍니다.

승인번호	위치	포장종류	굴착규모(m)		허가기간		변경사유	비고
			폭	연장	변경전	변경후
동대문구-2013- 기타-21	이문동 58-3	보도 (소형 고압)	3.7	23.4	2014.1.23. ~ 2014.10.31	2014.1.23. ~ 2015.6.30	예산부족에 따른 공사 기간연장

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	서관석		방재시설부장	11/12 임춘근
협조자	주무관	장수철
시행	방재시설부-11550	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개