투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	우이~신설 도시철도 2공구 책임감리원
(경유)
제 목	우이~신설 도시철도 2공구 건축분야 상주감리원 투입계획 변경 승인

1. 우이-신설(2공구)14-379(2014.11.11.)호와 관련입니다

2. 우이~신설 도시철도 2공구 건축분야 감리원 투입계획과 관련하여 귀 단의 검토의견과 같이 아래 사항을 승인 합니다.

가. 상주감리원 등급 조정(감리사→감리사보)

나. 2공구 전정거장(L04~L07)의 건축공사가 본격적으로 시행 예정인 2015.3.1. 이후 상주감리원 투입, 상주감리원 투입전까지는 품질 및 현장 안전 확보를 위해 책임감리원이 건축분야 기술지원감리원을 활용 현장 관리.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	권영수		공사지원과장	김창기		도시철도건축부장	전결 11/12 이병석
협조자
시행	도시철도건축부-7267	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 도시철도건축부	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-772-7351	/전송	02-772-7309	/		/	대시민공개