문서번호	물재생과-6198
결재일자	2014.11.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
홍민표		강병수	11/12 채희정
협조
	주무관		김근수

시설공사 폐기물 처리 및 설계변경 보고

- 청계천 하류횡단 차집관거 개선공사(2차분) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

중랑물재생센터

물재생과

- “청계천 하류횡단 차집관거 개선공사”일환 「살곶이공원앞 차집관로 이설공사」재개에 따른 발생 건설폐기물을 조기에 처리하여 환경관리에 철저를 기하고자,『청계천 하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역(한양여대앞)』에 포함 폐기물을 운반처리코자 하며,

- 추가 운반처리비 증가분에 대하여 당해 예산범위(98백만원)내에서 낙찰차액 활용 설계변경 시행코자함.

시설공사 폐기물 처리 및 설계변경 보고

1		용역 현황

가. 용 역 명 : 청계천 하류횡단 차집관거 건설폐기물 처리용역(한양여대앞)

나. 용 역 비 : 86,444천원

다. 계약업체 : 남부이엔티(주), 삼흥산업개발(주)

라. 용역기간 : 2014. 03. 31 ～ 2014. 12. 31.

2		보고내용

가. “청계천 하류횡단 차집관거 개선공사” 일환 「살곶이공원앞 차집관로 이설공사」   시행중 하천내 지장물(청계천 유지용수 공급관로)로 인한 신설관로 선형변경에 따라    내년(‘15년) 예상발생 총폐기물중 어도 및 낙차보호공 깨기 일부물량(폐콘리트 479㎥,     1,102톤)이 조기에 발생함에 따라 건설폐기물을 적기에 처리하기 위하여 6월말 기성준공   완료한 “한양여대앞 차집관거 이설공사”와 관련 분리발주 계약된『청계천 하류횡단 차집관거   건설폐기물 처리용역(한양여대앞)』에 포함 처리 시행코자 함.

▷ 폐기물 발생현황                                                      (단위 : ㎥)

구 분	폐아스콘	폐콘크리트	준설토	비고
소 계	-	1,475	-
▸한양여대앞 차집관로 이설공사	-	780	-	전량(780㎥)처리완료
▸차집관거 성능개선 시설공사	-	216	-	물재생과-3195(2014.7.16.)에따라 포함처리중 ⦁처리량 : 65㎥ ⦁잔 량 : 151㎥
▸살곶이공원앞 차집관로 이설공사	-	479	-

나. 계약물량중 폐콘크리트 물량 증가(457㎥)에 따라 물량증감(1,018㎥→1,475㎥) 사항을   반영코자 함.

▷ 주요 공종

구분	공 종	단위	당초	변경	증,감	비고
폐기물 운반비	폐아스콘운반	㎥	8	-	감)8
	폐콘크리트운반	㎥	1,018	1,475	증)457
	준설토운반	㎥	321	-	감)321
폐기물 처리비	폐아스콘	톤	19	-	감)19
	폐콘리트	톤	2,520	3,393	증)873
	준설토	톤	482	-	감)482

다. 설계변경 금액                                              (단위 : 원)

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감
총공사비		86,444,000	97,160,000	증)10,716,000
도급비	공급가액	78,585,455	88,327,273	증)9,741,818
	부가가치세	7,858,545	8,832,727	증)974,182
	계	86,444,000	97,160,000	증)10,716,000

3		조치내용

가. 위와 같이 건설폐기물량(폐콘크리트) 증가에 따른 운반 및 처리비 증가분(10백만원)   에 대하여 금년 예산범위(98백만원)내에서 낙찰차액을 활용 설계변경 시행 재계약코자함.

붙 임 : 1. 시설공사 폐기물처리 보고(방침서) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.