문서번호	교량보수과-4339
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
배상현		김환겸	11/14 송상영
협조

자동차전용도로 일상유지보수공사 집행잔액 활용계획

2014. 11

동부도로사업소

(교량보수과)

자동차전용도로 일상유지보수공사 집행잔액 활용계획

『2014년 자동차전용도로 보수공사』와 관련 폐기물처리비 및 관급자재비 집행

잔액을 활용하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 2014년 자동차전용도로일상유지보수공사(연간단가)-동부

공사기간 : 2014년 04월 07일~2015년 02월 28일

총공사비 : 580,000천원

- 도급비 : 570,000천원

- 이전비(폐기물처리비) : 10,000천원

공사개요 : 관내 자동차전용도로 일상유지보수 1식

도 급 사 : 엠투케이 건설(주)  대표 이명규

Ⅱ		예 산 현 황

예산내역

(단위:천원)

예산총액	계약액 ①	총 계	원인행위액 ②	총 계	잔액 (①-②)	총 계
		도급비		도급비		도급비
		관급비		관급비		관급비
		폐기물		폐기물		폐기물
596,000	596,000		584,821		11,178
	570,000		570,000		-
	16,000		14,121		1,878
	10,000		700		9,300

Ⅲ		활 용 계 획

미 조치사항 정비시행

- 도시안전과 현장점검시 지적된 사항들중 현재 미 조치된 사항에 대한 정비 시행

정비내역

(단위:천원)

시 설 명	소 요 예 산	세 부 내 역	비 고
합 계	11,178
구룡터널	8,718	▪ 아치부 풍도 슬래브 균열보수 180m	도시안전과 현장점검
	3,000	▪ 포이동측 장비 반입구 벽면 균열보수 30m	도시안전과 현장점검

활용금액 ⇒  11,178천원(집행잔액)

Ⅳ		사 진 현 황

아치부 풍도 슬래브 균열조사	장비반입구 벽체 균열

Ⅳ		행 정 사 항

「자동차전용도로 일상유지보수공사」에 대한 설계변경 시행코자 함.  끝.