문서번호	도시철도설비부-10526
결재일자	2014.11.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
황영필		서태창	11/17 정찬웅
협조

- 지하철 9호선 917공구 정거장 전기공사 관련 -

『신호변압기 용량변경(75kVA → 50kVA) 실정보고』건 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11

도시기반시설본부

도시철도설비부

- 지하철 9호선 917공구 정거장 전기공사 관련 -

『신호변압기(75kVA → 50kVA) 용량변경 실정보고』건 검토보고

신호변압기 용량변경(75kVA →50kVA)에 따른 실정보고건에 대하여 검토하고 보고드림.

Ⅰ		사업 개요

대지위치 : 9호선 2단계 917공구(930정거장)

규    모 : 정거장 1개소, 환기구 3개소

공사기간 : 2008. 06. 02 ～ 2014. 12. 31

계약금액 :  *************************

시 공 사 : GS건설(주)

감 리 사 : (주)유탑

Ⅱ		근 거

유탑전감 2014-531(2014.11.6.)호 “917공구(전기부문) 신호변압기 용량변경(75kVA → 50kVA) 실정보고”

Ⅲ		실정보고 내용

신호변압기 용량변경에 따른 감액

- 당   초 : 75kVA

- 변   경 : 50kVA

공사비 증감내용

구 분	변경전	변경후	증 감	비 고
신호 변압기	**********	**********	********

책임감리단 의견

- 신호용 변압기 용량 변경은 적정하며, 용량 변경 후 감액금액은 조정이 필요함.

Ⅳ		검토 결과

신호용 변압기 용량변경에 대하여는 실정보고를 승인하고,

용량 변경 후 감액되는 금액은 근거자료를 추가하여 향후 설계변경시 정산토록 감리단에 통보코자 함.

따로붙임 : 실정보고 승인 요청 문서 1부.  끝.