투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2014 강서 관내 도로 시설물 세척 용역-정산)

1. 시설보수과 – 9307(‘14.11.20)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진중인 『2014년 강서 관내 도로시설물 세척 용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 강서관내 도로시설물 세척용역

나. 용역개요 : 세척면적 230,843㎡

다. 용역기간 : 2014. 4. 17 ~ 2014. 12. 31.

라. 계약금액 : 200,209,660원(일금이억이십만구천육백육십원)

마. 도 급 자 : ㈜원앤준에프엠 대표 한정임

바. 변경내역                                                (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증・감
총 용 역 비	200,209,660	199,108,860	감) 1,100,860
공 급 가 액	182,008,782	181,008,000	감) 1,000,782
부가 가치세	18,200,878	18,100,800	감) 100,078
계	200,209,660	199,108,800	감) 1,100,860

사.예산과목

- 도시안전실, 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영(도시개발특별회계), 도로시설물(터널, 복개, 지하차도)일사유지  보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임    1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	이승행		시설보수과장	代류춘광		강서도로사업소장	11/24 조병준
협조자	주무관	천석기		주무관	代이재민		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-9403	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7910	/	2ss2hh@seoul.go.kr	/	대시민공개