함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(토목,건축시설물 유지보수공사)

1. 우리정수센터내 시행중인 『토목․건축시설물 유지보수공사(연간단가)』의 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 토목․건축시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체 : 건승엔지니어링㈜ 대표 이안순

다. 공사기간 : 2014.04.07~2014.12.10

라. 계약금액

- 당 초 : 금삼천오백오십오만오천일백이십원(\35,555,120원)

- 변 경 : 금이천삼백일십팔만삼천일백일십원(\23,183,110원)

- 감    : 금일천이백삼십칠만이천일십원(\12,372,010원)

마. 변경사유 : 시공물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 기타교체비(수선유지교체비)

따로붙임 : 1) 설계변경 보고서 1부.

2) 합의서(설계변경) 1부.

3) 설계변경 심의위원회 개최결과 보고 1부.

4) 설계변경 내역서 1부.  끝

주무관	김왕주		정수시설과장	현인식		영등포아리수정수센터소장	11/24 임정규
협조자
시행	정수시설과-8096	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개