투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울도서관
수신	성북구청장(문화체육과장)
(경유)
제목	2014년 장애인도서관 시설개선사업 사업내용 변경 승인(성북점자도서관)

성북구청 문화체육과-29105(2014.11.27.)호와 관련하여 「2014년 장애인도서관 시설개선사업」시비보조금으로 추진하고 있는 성북점자도서관 시설개선사업에 대한 사업계획을 아래와 같이 승인하오니 보조금 집행지침을 준수하여 집행하시기 바랍니다.

가. 도서관명 : 성북점자도서관

나. 총사업비 : 59,309천원(시비 50,000천원, 자부담 9,309천원)

다. 변경사항 : 사업기간 변경 및 예산내역 변경

라. 변경사유

- 당초 사업시행 기간이 8월부터 였으나 도서관 운영의 휴관시기나 업체 선정과정에서 유찰이 되며 사업시행 기간이 지연됨.

- 당초 예산계획은 60,700천원(시비 50,000천원, 자부담 10,700천원)이었으나 업체를 선정하며 입찰차액(7,055천원)이 발생, 차액분을 서가 정리를 위한 모빌랙 설치 공사 시행

마. 변경내역

(단위 : 천원)

예산비목	당초예산(A)		변경예산(B)		증 감(B-A)		비 고
	시 비	자부담	시 비	자부담	시 비	자부담
재료비	14,758	5,000	14,758	-	-	감5,000
노무비	14,269	5,000	14,269	-	-	감5,000
경비	8,066	700	8,066	3,645	-	증2,945
일반관리비 외	7,389	-	7,389	-	-	-
부가세	5,518	-	5,518	-	-	-
모빌랙 설치비	-	-	-	5,664	-	증5,664
합 계	50,000	10,700	50,000	9,309	-	감1,391

끝.

							서울도서관장
주무관							임혜진			도서관정책과장					백선기					서울도서관장					11/27 이용훈
협조자
시행			도서관정책과-9492									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02)2133-0228						/전송								/	cleo21@seoul.go.kr												/	대시민공개