문서번호	산지방재과-7771
결재일자	2013.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	사면관리팀장	산지방재과장		푸른도시국장
조임남	유혜미	정중곤		07/18 오해영
협 조	도로관리과장		정시윤
	공동주택과장		이계섭

사면전수조사 및 산사태 피해저감시스템 구축(3단계) 용 역 시 행 계 획

2013.07.

푸 른 도 시 국

[산지방재과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	인근지역주민 조사참여	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	관련분야(토질,수문,산림 등) 전문가 조사참여	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

｢사면 전수조사 및 산사태 피해저감 시스템 구축(3단계)｣

용역 시행계획

기후변화에 따른 국지적 집중호우로 산사태 피해가 급증하고 있어, 산지 및 도로․주택사면의 안전관리 도모를 위한 사면 전수조사 및 산사태 피해저감 시스템 구축 3단계 용역을 발주하고자 함.

1		추진근거

○ 서울시 사면 전수조사 및 피해저감 시스템 구축 용역 계획

(행정1부시장 방침 제10320호, ′11.12.09)

○ 산사태 예․경보시스템 구축 및 산사태 위험지역 사전 모니터링 강화 등

(시장공약 5-4-3, 5-4-8, 추가)

2		추진경위

○ '11.07.27 : 산사태 발생(우면산, 대모산, 관악산 등 81개소)

○ '11.12.09 : 사면 전수조사 및 피해저감 시스템 구축 용역 계획 수립

(행정1부시장 방침 제10320호)

○ '11.12.~'12.11. : 사면 전수조사  용역시행(1단계) (계약자 : 서울연구원)

○ '12.07.30 : 사면 전수조사 용역 2단계 계약(계약자 : 서울연구원)

○ '13.07. 현재 : 2단계 전수조사 용역 공정율 96%

- 산지, 도로, 주택사면 현장조사 및 위험사면 정밀조사 완료

- 토석류 시뮬레이션, 안정성해석, 산사태피해영향권 분석

- 사면관리시스템 정보전략계획(ISP) 수립

3		사업계획 조정

○ 사    유

- 사면관리시스템 정보전략계획(ISP) 용역결과('12.8~'13.4, 서울연구원)

산지, 도로, 주택사면의 효율적관리 및 산사태 예방·대응 지원을 위한 웹기반 사면관리시스템 구축 필요

- 사면관리시스템 구축 계획(행정2부시장 방침 제182호, '13.05.27)

구 분	2013년	2014년	2015년
사면관리시스템	- 사면 통합데이터 베이스 구축 - 사면관리시스템 구축	- 원격모니터링시스템 구축 - 현장조사시스템 구축 - 대시민 웹포탈 시스템 구축	- 실시간 상황관리시스템 구축

- 사면관리시스템 구축 변경내역

당초 사면관리시스템은 DB자료구축,원격모니터링시스템,현장조사시스템 구축이었으나 시민서비스를 위한 웹포탈시스템 및 산사태예방,대응을 위한 실시간상황관리시스템이 추가되었음.

(단위:백만원)

구 분	계	H/W 및 S/W	DB 구축	사면관리시스템	현장조사시스템	원격모니터링	대시민웹포탈시스템 등	실시간상황관리시스템
당초	1,000	94	44	267	82	513	0	0
변경	1,955	448	192	338	84	501	188	204

○ 전체 조정(변경) 내역

(단위:백만원)

구 분	계	1 단계 (2011년)	2 단계 (2012년)	3 단계 (2013년)	4 단계 (2014년)	5 단계 (2015년)
당초(전체) (시스템구축)	7,200 (1,000)	1,000	1,955	2,257 (1,000)	1,988
변경(전체) (시스템구축)	8,155 (1,955)	1,000	1,955 (72)	2,257 (614)	2,700 (1,026)	243 (243)

○ 사업개요 및 년도별 주요 사업내용

- 사업기간 : '11.12. ~ '15.12.

- 사면 전수조사 대상

▸ 근교 큰 산 및 산지형 근린공원 사면       :   110개소  130㎢

▸ 도로사면(석축, 절개지, 옹벽)             : 2,470개소  278㎞

▸ 주택사면(석축, 절개지, 옹벽)             :   667개소    45㎞

- 년도별 주요 사업내용

구 분	1단계 (2011년)	2단계 (2012년)	3단계 (2013년)	4단계 (2014년)	5단계 (2015년)
용역기간	′11.12.~′12.11.	′12.08.~′13.08.	′13.08.~′14.07.	′14.01.~′14.12.	′15.01.~′15.12.
사업내용	-사면 기본자료 조사 -사면 전수조사 및 정밀조사 (산지20, 도로380, 주택110) -시뮬레이션, 안정성 해석 및 피해 영향권 분석 등 -산지 관리기준 작성	-사면 기본자료 조사 -사면 전수조사 및 정밀조사 (산지53, 도로450, 주택240) -시뮬레이션, 안정성 해석 및 피해 영향권 분석 -사면 유지관리시스템 정보 전략계획(ISP) 수립 등	-사면 전수조사 및 정밀조사 (산지37, 도로700, 주택200) -시뮬레이션, 안정성 해석 및 피해 영향권 분석 -사면기본자료 DB구축 및 사면관리시스템 구축 지원	-사면 전수조사 및 정밀조사(도로940, 주택117) -시뮬레이션, 안정성 해석 및 피해 영향권 분석(종합) -사면 재해예방 정책비전 및 산사태 재난대응 매뉴얼 개발 등 -산사태 예․경보 시스템 시범 구축 등 웹기반 사면관리시스템 구축지원	-실시간 상황관리 시스템 구축지원

4		3단계 용역 발주계획

○ 용 역 명 : ｢사면 전수조사 및 산사태 피해저감 시스템 구축(3단계)｣

○ 용역기간 : '13.08.~'14.07.

○ 주요 과업내용

- 사면 기본자료 조사

- 사면 전수조사 및 위험사면 정밀조사

- 시뮬레이션, 안정성 해석, 피해 영향권 분석 및 위험등급 분류

- 사면 기본자료 DB구축 및 사면관리시스템 구축지원 등

○ 계약방법 : 수의계약

- 계 약 자 : 서울연구원

※ 조사․연구용역의 원활 및 일관성 유지와 체계적이고 전문성을 확보할 수 있는 1,2단계 용역 수행자인 서울연구원과 수의계약으로 추진

- 근거법령 : 지방계약법 시행령 제25조제1항제8호 사항

「서울특별시 서울연구원 육성조례」 제4조제1항

○ 소요 용역비 : 1,643백만원

5		향후 추진일정

○ '13.07.             : 기술용역 타당성 심의 및 발주전 심의

○ '13.07.             : 일상감사 및 계약

○ '13.08.~ '14.07.  : 용역 착수 및 준공

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부.   끝.