문서번호	시설관리과-25185
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
곽진선	최양주	이자원	12/01 이상래
협 조

화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소

세척갱생관 정비공사  설계변경 계획

2014. 12

화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소

세척갱생관 정비공사  설계변경 계획

화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사에 대한 신규공종 발생과 물량 증･감에 따른 설계변경 계획을 보고 드림

※ 관련공문 : 공사감독2처-20216(2014.11.25.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소

○ 규   모 : 관로(D=15~200㎜, L=1,264m ), 변실(D=80~300mm,32개소)

○ 기    간 : 2014. 4. 4.~ 2014.12.9.

○ 총공사비 : 732,626,620원

총공사비	도급비	관급비	복구 및 기타	비고
732,626,620	361,928,620	130,698,000	240,000,000	낙찰률 86.768%

○ 시 공 사 : 용은씨엔씨(주) – 현장대리인 김용만

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 서홍석

○ 공 정 률 : 100%(D15~200㎜, L=1,331m)

□ 예산과목

○ 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비(세척갱생관)

□ 설계변경 사유

○ 실정보고에 의한 변경사항

- 기존관 철거 및 폐쇄 수량 변경

- 불용상수관 폐쇄에 따른 가정 인입 연결관 추가 시공

- 3구간 단수범위 축소를 위한 단절관 연결

- 보도구간(3구간) 인조잔디 매트 설치

- 토공장비 변경(1,2구간:B/H 0.2→0.4, 3구간: B/H 0.4→0.2)

○ 실 시공수량 정산에 따른 변경사항

- 부대공 수량 실정산(교통정리원 및 조명시설 설치,철거 등 수량 감)

- 제경비 실정산(건설하도급발급수수료 및 산업안전보건관리비 등 감)

- 밸브재용에 따른 원형변실 설치공 감소 등

○ 주요공종 수량 증·감 현항

구분	공 종	단 위	당 초	변 경	증,감
1	관로부설 15~50mm	m	44	92	증 48
2	관로부설 80~200mm	m	1,220	1,267	증 47
3	원형밸브실 설치공(80~300mm)	개소	32	20	감 12
4	교통정리원(야간)	인	182	50	감 132

- 증가 : 인력터파기외 103개

- 감소 : 아스팔트 포장절단공외 201개

□ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	732,626,620원	658,476,640원	감) 74,149,980원
도급비	361,928,620원	284,658,000원	감) 77,270,620원
관급비	130,698,000원	133,037,000원	증) 2,339,000원
이전비(복구비 및 기타)	240,000,000원	240,781,640원	증) 781,640 원

□ 행정사항

○ 사업소 자체 설계변경 심의 위원회 개최(타당성 검토)후 금액변경 및 물량 증․감에 따른 설계변경 시행

붙임 : 1. 설계변경보고서1부.

2. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경도면 1부.  끝.