문서번호	도시철도설계부-4295
결재일자	2013.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
오반교	박상태	박상돈	신한철		06/05 조성일
협 조
	시설국장			이광세

′13년 5월 수방대비 특별점검 결과보고

2013. 6.  .

도시기반시설본부

(도시철도설계부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

′13년 5월 수방대비 특별점검 결과보고

우리본부 건설공사장에 대하여 우기철 공사장의 수해예방을 위하여  건설안전자문위원과 합동으로 실시한 특별 안전점검 결과보고 임.

【조치결과는 추후 별도보고】

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 일 : ‘13. 5. 15(수) ～ 5. 24(금) - 7일간

점검대상 : 38개 공사장

계	시 설 국				도 시 철 도 국
	소계	토목부	건축부	설비부	소계	도시철도 공무부	도시철도 토목부
38	25	21	2	2	13	6	7

점 검 반 : 20개반 연인원 78명

- 건설안전자문위원 : 대학교수 등 분야별 전문가(39명)

- 본   부 : 안전과 (연인원 39명)

점검내용 : 수방대책 및 준비사항, 하천공사장 유수소통 지장물 제거 상태, 흙막이공 및 절․성토사면 관리상태, 시민불편사항 등

Ⅱ		점 검 결 과

	총 평
□ 점검결과 총 136건의 지적사항 중 수방관련 분야가 56건(41%), 토공․가시설 16건(12%), 안전분야 20건(15%), 터널․계측 9건(7%), 품질 8건(6%), 기술검토․시민불편사항․환경정비 분야가 27건이 지적되었음 □ 금회 점검 지적사항 중 위험도가 매우 높거나, 긴급조치를 요하는 지적사항은 없음 - 수방관련 지적사항은 타 공사에 우선하여 조치 (6월 10일한 조치완료)

부서별 공사장 및 지적 현황

구 분	계	시 설 국				도시철도국
		소계	토목부	건축부	설비부	소계	도시철도 공무부	도시철도 토목부
대상공사장	38	14	21	2	2	13	6	7
지적건수	136	91	77	5	9	45	27	18

유형별 지적 현황

구 분		수방대비	토공․가시설 토류벽분야	안전분야 (지장물 포함)	터널/ 계측분야	기술검토 분야	품질분야	시민불편사항 (교통 등)	기 타 (환경 등)
지적건수	136	56	16	20	9	8	8	5	14
비 율	100	41%	12%	15%	7%	6%	6%	3%	10%

주요 지적사항(사진대지 별첨)

□ 수방대비 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
도림교 확장공사	- 하천의 호안일부가 공사로 인하여 훼손되어 있으니 가능한 곳부터 조속히 호안을 복구하여 법면보호에 만전을 기할것.	사진①
동부간선도로확장 2공구	- 제방복구는 우기 시작전인 5월말까지 완료하고, 제방다짐에 대한 꼼꼼한 확인 요함 - 차집관로 및 천연가스관 이설작업 우기전 완료하여 통수능력 확보	사진②
용허리공원 빗물저류조 설치공사	- 유입관거(2.0×1.5,박스) 터파기 및 가시설 설치중으로 우기시 원활한 유입을 위해 조속히 시공요함	사진③
우이~신설 경전철 1공구 건설공사	- 백운천 기존 하수박스와 신설 하수박스 복구철저 및 하천유수에 지장이 없도록 자재 정리요함.	사진④

공 사 명	지 적 사 항	비고
구리~암사대교 건설공사	- 바지선 앞 및 후미에 설치된 볼라드 교체 및 내부하부 보강요함	사진⑤
월드컵대교 건설공사	- 공사용 바지선 경강호외 10척은 삼성 계류장(묘박지)에 거치 예정으로 바지선 관리실태 및 구조안정성에 대하여는 현재 한국선급에서 안전도 검사를 시행 중에 있으므로 검사완료 후 결과 보고서 제출 요함	사진⑥

□ 토공, 가시설 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
우이~신설 경전철 3공구 건설공사	- L08정거장 암굴착구간의 중앙파일에 챤넬을 조속히 설치요함.	사진⑦
우이~신설 경전철 1공구 건설공사	- 차량기지구간에 설치된 어스앵커의 철저한 계측관리가 요구됨.	사진⑧

□ 안전시설 분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
용마터널 건설공사	- 시점부 터널 갱구부 상부사면에서 낙석으로 이한 안전사고 우려되니 낙하물 방지망을 설치하여 근로자가 안전하게 통행할수 있도록 조치요함	사진⑨
우이~신설 3공구 건설공사	- L08정거장 버력처리용 작업버켓에 설치된 체인형 샤클은 4개를 설치하여 작업요함	사진⑩
강남순환 도시고속도로 8공구	- 주암교 동바리 해체작업을 위하여 차도를 점유한채 크레인 작업중으로 안전사고 예방을 위하여 교통안전시설 보완할것	사진⑪

□ 품질분야

공 사 명	지 적 사 항	비고
지하철9호선 921공구 건설공사	- 935정거장 1단 벽체에 에어포켓이 많이 관찰되고 있어 다짐이 미흡한 것으로 사료되니 콘크리트 다짐관리를 철저히 하기 바람.(에어포켓 부분은 보수 요함)	사진⑫
서부트럭터미널 지하차도건설공사	- 지하차도 종점부 U-Type 벽체부(파라펫) 방수시트를 시공한 상태이나 일부접합이 미비하여 방수기능 저하가 우려되니 마무리를 철저히 할 것	사진⑬

□ 기술검토•시민불편 사항

공 사 명	지 적 사 항	비고
서남권야구장 건립공사	- 최악의 경우(지면까지 물이 찻을때)에 대비한 지하층 부력검토가 필요함	사진⑭
천호대로(광나루역) 확장공사	- 파형강관 터널부위 편토압에 대한 주의 및 연성구조이므로 배수시설을 철저히 관리하여 피형강관이 찌그러지는 일이 없도록 주의요함	사진⑮
우이~신설 경전철 4공구 건설공사	- L12정거장 인접 보도훼손부 기존보도와 같은 재질로 정비요하며, 가설휀스는 도색 등 정비요함.	사진

Ⅲ		행 정 사 항

지적사항에 대한 조치결과는 별도 보고

일반 지적사항은 7일 이내 조치 후 결과 제출 하고, 자문․검토 등으로 다소 시일이 소요되는 지적사항은 7일 이내 처리계획을 수립하여 제출

주요지적 사항에 대하여는 정기점검 시 조치실태를 확인

따로붙임 : 1) 점검결과 주요지적 사진 1부.

2) 공사장별 지적내용(총괄) 1부. 끝.