투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(제3회)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제3회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 1 ~ 2015. 2. 28

다. 계약금액 : 635,000,000원

라. 도 급 자 : 삼서건설(주)  나남열

마. 설계변경(정산)사유

- 맨홀 인상높이 신규공종(12~17㎝) 발생

- 공종별 수량 조정

바. 설계변경내역

- 공사비 변경 : 변경없음

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
총공사비	635,000,000	635,000,000	-
도 급 비	635,000,000	635,000,000	-
관 급 비	-	-	-
이 설 비	-	-	-

- 공종별 물량변경

공 종	규 격	단위	변경수량		증,감	비고
			당초	변경
계		개소	743	727	감)16
하수도	Ø648	개소	161	133	감)28
상수도	Ø648	개소	225	243	증)18
하수,통신 등	Ø766	개소	179	175	감)4
통신,전기 등	Ø918	개소	114	127	증)13
통신,전기 등	Ø1108	개소	6	2	감)4
통신,전기	□1080×580	개소	21	8	감)13
특수소형	Ø250	개소	37	39	증)2

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속믈관리(도시개발),노후포장도로정비공사,

시설비

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 제비율 검증결과 자료 1부.

3.설계변경 검토보고서 1부. 끝.

주무관	홍수종		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	12/04 代홍영두
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-5391	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	2210-1532	/전송	2210-1549	/	hongsc57@seoul.go.kr	/	대시민공개