문서번호	건축부-14625
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김현지		신명승	12/05 김우성
협조
	주무관		박영동

『돈화문 국악예술당 건립공사 시공감리용역』

배치조정 및 계약변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12

도시기반시설본부

건  축  부

『돈화문 국악예술당 건립공사 시공감리용역』

감리원 배치기간 조정 및 계약변경 검토 보고

「돈화문 국악예술당 건립공사 시공감리용역」관련 공사기간 변경계약 에 따른 감리원 배치기간 조정 및 계약변경(총차 및 2차분) 검토 보고

1		용역개요

○ 용 역 명 : 돈화문 국악예술당 건립공사 시공감리용역

○ 용역기간 : 2013.12.17.~2015.08.19.

○ 용역금액 : 605,461천원

○ 감 리 자 : ㈜영화키스톤건축사사무소 대표 김주열

2		추진경위

○ `13.12.17 : 시공감리용역 계약 및 착수

○ `14.06.25 : 2차분 용역 착수

○ `14.07.04 : 토목분야 상주감리원 조정배치 검토보고(건축부-8160호)

○ `14.10.16 : 공사계약기간 변경(`15.6.16 → `15.10.16)
○ `14.12.01 : 감리원 배치기간 조정요청(영화관리14-519호)

3		감리원 배치기간 조정

분야	성명	감리원 배치기간		비 고
		당 초	조 정
건축	이한원	`13.12.20~`15.08.19	`13.12.20~`15.12.16	연장배치
토목	유대영	`14.02.10~`14.07.09	`14.02.10~`14.12.30	연장배치

○ 조정사유

- 시공감리원 : 공사계약 기간이 변경됨에 따라 연장배치
- 토목분야 상주감리원 :부대토목공사 완료일까지 연장배치 및 감리대가 정산

4		총차 및 2차분 계약변경

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
기간	총차	`13.12.20~`15.08.19	`13.12.20~`15.12.16	증 120일
	2차	`14.06.25~`15.06.01	`14.06.25~`15.07.22	증 52일
금액	총차	605,431	731,337	증 125,906
	2차	330,000	360,000	증 30,000

○ 예산현황

(단위: 천원)

구 분	2014년 당햬예산	재배정예산	예산잔액	비고
감리비	360,000	330,000	30,000

- 예산과목 : 문화정책과, 문화도시서울구현, 문화기반시설조성, 돈화문로 전통문화시설 건립(도시계발특별회계), 감리비

5		검토 및 처리의견

○ 공사 계약기간이 당초 `15.6.16에서 ’15.10.16로 연장됨에 따라 공사기간에 맞추어 감리용역기간을 연장(`15.08.19→`15.12.16)하고자 함.

○ 부대토목공사가 `14.12.31일 준공됨에 따라 토목분야 상주감리원의 감리대가는 2차계약 금액 내에서 감리대가를 정산하고, 타분야 감리원(건축,기계,전기,통신,조경 분야)은 후속공종 진행에 따라 배치기간을 조정.

○ 용역기간 연장에 따라 총차 계약금액을 변경하고, 2014년도 감리비가 원인행위미필로 불용되는 것을 방지하기 위해 예산잔액(30백만원)을 2차분 계약금액에 조정하여 변경계약 하고자 함.

붙임 1. 감리용역 배치조정 실정보고서 1부.
2. 공사예정공정표 1부. 끝.